문서번호	기전과-10719
결재일자	2021. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
최민규		代이정호	12/13 차창훈
협조
	주무관		이태근

『2021년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사』

설계변경검토보고(2차)

2021. 12.

남부도로사업소

[기 전 과]

『2021년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사』

설계변경검토보고(2차)

2021년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가) 중 감리원으로부터 제출된 설계변경보고에 대해 아래와 같이 검토보고 함.

Ⅰ
		관 련 근 거

□ ㈜인스펙트 인스(비)2112-009호(2021.12.13)

「2021년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)-남부 2회 설계변경 건」

Ⅱ
		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2021년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

□ 공사위치 : 관내(동작, 관악, 금천, 서초, 영등포 일부)

□ 공사내용 : 교통안전표지 신설(서울지방경찰청 규제) 및 일상 유지보수

□ 계약금액 : ************

□ 계약업체 : *****************

□ 계약기간 : 2021. 2. 19. ~ 12. 28.

□ 감 리 사 : *******

Ⅲ
		추 진 경 위

□  ’21.02.04. : 공사발주

□      02.21. : 공사착공

□      05.11. : 제1차 작업지시

□      06.21. : 제2차 작업지시

□      08.25. : 제1차 설계변경

□      09.24. : 제1차 기성준공

□      10.01. : 제3차 작업지시

□      11.17. : 제4차 작업지시

Ⅳ
		설계변경 사항

□ 주요 설계변경 내용

◼ 주요 공정 물량 변경

연번	품 명	규 격	단 위	수 량
				당 초	변 경	증 감
1	증형 원형 신설	780(고휘도)	매	9	7	감 02
2	중형 오각 교체	780*936(고휘도)	매	4	1	감 03
3	중형 사각 신설	780*1170(고휘도)	매	6	8	증 02
4	중형 T형부착대 교체	1매용 백관	조	8	7	감 01

※ 물량 변경 세부내역은 붙임 참조

□ 제경비 정산

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
직접재료비	**********	**********	***********
직접노무비	***********	**********	************
간접노무비	**********	*********	***********
산재보험료, 고용보험료	*******	*******	***********
건강보험료, 연금보험료 퇴직공제부금, 노인요양보험료	*******	*	***********
산업안전보건관리비, 환경보존비 등	*********	*	***********
경비(기계, 기타)	*********	*********	***********
간접비(일반관리비, 이윤 등)	**********	**********	***********
합 계	**********	**********	*

□ 설계변경금액 : 금액변동 없음                    (단위 : 원)

구 분		금 액
		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공 급 가 액	**********	**********	-
	부가가치세	*********	*********	-
	합 계	**********	**********	-

◼ 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통사업특별회계, 교통안전표지 설치 및 유지보수, 시설비

□ 감리원 기술검토 의견

◼ 현장여건에 따른 제1~4차 작업 물량내역 조정 및 제경비 정산등을 반영하여 설계변경을 실행하는 것이 타당하다 사료됨.

Ⅴ
		보고자 의견

□ 감리원 설계변경 요청사항 검토 결과

- 제1~4차 작업물량 변경 및 제경비 정산 등으로 책임감리원의 설   계변경 검토의견이 타당함으로 이를 반영하여 설계변경 시행 후   공사 준공 하고자 함.

Ⅵ
		향 후 계 획

□ 2021.12.14. : 설계변경 시행

□ 2021.12.17. : 공사 준공

붙임  1. 감리원 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 원가검증 확인서 1부.  끝.