문서번호	녹지관리과-4109
결재일자	2021. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리팀장	녹지관리과장
이지혜	김한섭	12/13 박기선

- 2021년 재해 위험수목 제거 및 정비사업(연간단가) -
설계변경 검토보고

2021. 12.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

- 2021년 재해 위험수목 제거 및 정비사업(연간단가) -

설계변경 검토보고

『2021년 재해 위험수목 제거 및 정비사업』추진시 현장여건 변화 등에 의한 설계변경사항이 발생하여 아래와 같이 검토하고 설계변경 시행코자 합니다.

1		사업개요

□ 사 업 명: 2021년 재해 위험수목 제거 및 정비사업

□ 위    치: 남산공원 및 산하공원

□ 사업내용: *************************

□ 사업기간: 2021. 2. 19. ~ 12. 20.

□ 도 급 비: *************

□ 도 급 자: *******************************

2		설계변경 검토내용

□ 주요 변경내용: 현장여건에 따른 수량 및 규격 변경

공 종	단위	수 량			검토보고	금액증감 (단위: 원)
		당초	변경	증감
순공사비
1) 위험수목 제거 (B20~65)	주	***	***	***	○*************** *******	**********
2) 수형조절(일반전정) (B11~70)	주	***	***	***	○************* *************** **********	**********
소 계						**********
2. 제경비						**********
합 계						**********

3		공사비 변경내용

구 분		공 사 금 액 (단위: 원)			비고
		당 초	변 경	증 감
도급비	공급가액	***********	***********	**********
	부가가치세	**********	**********	********
	계	***********	***********	**********

4		보고자의견

□ 상기와 같이 현장 여건에 따른 위험수목 정비물량 및 규격 등을 반영하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액검증확인서 1부.  끝.