문서번호	시설관리과-29625
결재일자	2021. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
유강현	유광창	송병욱		12/13 이재호
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

「중화동 294-9번지 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사」

설계변경 심의결과 보고

2021. 12.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「중화동 294-9번지 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사」

설계변경 심의 결과 보고

우리사업소에서 시행한『중화동 294-9번지 외 6개소 장기사용 배급수관정비공사』와 관련 설계변경 심의결과를 보고드림.

공사현황

가. 공 사 명: 중화동 294-9번지 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사

나. 공사개요

- 당초 : D=20~300mm, L=1,879m

- 변경 : D=20~300mm, L=1,511m(감368m)

다. 계약기간: 2021. 4. 30 ~ 2021. 12. 20

라. 계약상대자: ************

마. 계약금액:*************

바. 설계변경 금액:****************************

2. 설계변경 현황

가. 설계변경 사유

- 현장여건 변화에 따른 시공물량 증감 및 신규공종 발생

나. 설계변경 세부내역

- 시공물량 증,감 현황

· 터파기[굴삭기(타이어)0.18㎥] 등 224개 공종

- 신규공종 발생

· 신규공종 : 콘크리트 포장절단(200mm이하) 등 75개 공종

- 산재, 고용보험료 등 제경비 변경

3. 공사비 변경내역                                      (단위:원)

구 분		당초	변경	공사비 증ㆍ감
도급비	공급가액	635,455,500	538,636,364	감)96,819,136
	부가가치세	63,545,550	53,863,636	감)9,681,914
	계	699,001,050	592,500,000	감)106,501,050

4. 설계변경 심의위원회 개최 결과

가. 설계변경 심의위원회 개최

- 개최일자: 2021.12.13.(월)

- 개최장소: 시설관리과 사무실(3층)

- 참석위원: 시설관리과장 외 4인

- 심의내용: 신규공종 단가산출 및 시공물량 증감 등의 적정성 검토

- 심의결과: 변경내역이 적정함

나. 변경계약 의뢰

- 설계변경 심의위원회 심의결과 변경내역이 적정하다는 의견에 따라 설계변경을 시행하고, 행정지원과로 변경계약 의뢰코자 함.

붙임  1. 설계변경 추진 계획 보고서 1부.

2. 설계변경 심의 설명서 1부.

3. 설계변경 심의 의견서 1부.

4. 설계변경 내역 및 검증확인서 각 1부  끝.