더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행[오패산로3길 164 ~ 화랑로 57 차집시설 설치공사]

우리 구에서 시행 중인 「오패산로3길 164 ~ 화랑로 57 차집시설 설치공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 오패산로3길 164 ~ 화랑로 57 차집시설 설치공사

나. 공사기간 : 2021. 3. 25. ~ 12. 15.

다. 도 급 자 : ㈜엔씨종합건설 대표 최은학

라. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 ㆍ 감		비 고
총 공 사 비	1,297,917,000	1,126,219,940	감)	171,697,060
도 급 비	728,727,000	651,980,000	감)	76,747,000
관 급 비	3,710,000	-	감)	3,710,000
이 전 비	565,480,000	474,239,940	감)	91,240,060

마. 설계변경 사유 : 시공물량 증·감 발생 등

바. 예산과목

○ 물재생계획과, 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(공기업특별회계)

붙임  1. 설계변경(정산) 사유서 1부.

2. 설계변경(정산 )내역서 및 제비율검증표 각 1부.

3. 예비준공 검사 계획 및 결과보고 각 1부.

4. 관련 방침서 각 1부.  끝.

주무관							김창현				치수담당					김재준					치수과장					김윤기					건설교통국장						12/13 임승락
협조자				계약담당							신정경					재무과장							代손영희
시행			치수과-20094										(						)		접수												(						)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 치수과 (삼선동5가)																/			http://www.sb.go.kr
전화		02-2241-3624							/전송								/	chkim1223@sb.go.kr													/	부분공개(5)