코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청(물재생센터 대기오염물질 배출시설 개선방안 수립 용역)

1. 『물재생센터 대기오염물질 배출시설 개선방안 수립 용역』에 대하여 다음과 같이  준공기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약명 : 물재생센터 대기오염물질 배출시설 개선방안 수립 용역

(계약번호 : 20210*******00)

나. 계약일 : 2021. 5. 4.

다, 계약금액 : 금523,900,000원

라. 계약업체 : ㈜동해종합기술공사 외 1개사

마. 변경사항

구분	변경전	변경후	변경사유
준공기한	2021. 5. 4. ~ 2021. 12. 20.	2021. 5. 4. ~ 2022. 3. 31.	대기오염물질 배출시설 대정비 및 가동중지로 준공기한 조정

바. 지연배상금 : 미부과(귀책사유 : 서울특별시)

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부. 끝.

	물재생시설과장
실무사무관	김형집		물재생기전팀장	최년수		물재생시설과장	12/13 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-12805	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 중구 덕수궁길 15 물순환안전국 물재생시설과	/
전화	02-2133-3840	/전송	02-2133-1042	/	khjib@seoul.go.kr	/	부분공개(5)