문서번호	물순환정책과-21398
결재일자	2021. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물순환시설팀장	물순환정책과장
최용석	김서연	12/13 김재겸

「CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역」

준공기한 연기 보고

2021. 12.

물순환안전국

(물순환정책과)

「CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역」

준공기한 연기 보고

CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립용역과 관련, 유량 및 수질조사 지연, 한강유역환경청 등 협의에 따른 공기 부족에 따라 과업기간을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립 용역

○ 용역기간 : ’21. 3.30. ~ ’21.12.31.

○ 용역수행사 : ㈜범한엔지니어링 종합건축사사무소, ㈜삼우씨엠건축사사무소, ㈜삼우전기컨설턴트

○ 계약금액 : 339,220천원

○ 사업내용 : CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립

- 뚝섬, 대치유수지 CSOs 저류조 설치계획 수립

□사업 타당성 및 경제성 분석‧결과 제시

□대상지역의 처리유량, 오염부하량 조사

□소요사업비 및 사업기간 산정, 연차별 투자계획 수립 등

- 기설치 시설 운영현황 분석을 통해 물재생센터 연계 운영계획 수립

- 유수지내 CSOs 저류조 설치 계획외 CSOs 저류‧처리 방안 제시 등

Ⅱ		추진경위

○ ’21.03.31. : 설계용역 계약 및 착수

○ ’21.06.01. : 착수보고

○ ’21.12.08. : 용역중지

Ⅲ		준공기한 연기

○ 연기사유

- 선행 무강우 일수 5일이상 준수에 따른 유량 및 수질조사 지연

□ 과업내용서 및 비점오염저감시설(국고보조사업)의 설치 및 관리 지침에 따른 유량 및 수질 모니터링 기준 충족 필요

- 한강유역환경청, 환경부 등 협의 및 보완을 위한 공기 부족

○ 검토의견

- 유량 및 수질조사 지연(’21.6.~8월 중 강우조사 여건 부족) 사유가 타당하며 관계기관 협의 및 보완 등 행정 절차 이행을 위한 공기가 절대 부족함에 따라 정상적인 과업수행을 위해 용역기간 연기 필요.

○ 용역기간 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
****	****************	********************	******

○ ***************

○ ***************

Ⅳ		조치계획

○ 준공기한 연기에 따른 계약변경 의뢰

붙임  CSOs 저류조 기본계획 과업연기 공문(합의각서 포함).  끝.