투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 건설폐기물 처리용역(연간단가) 설계변경 시행

1. 시설과-5817(2021.10.7)호 및 7511(2021.12.13.)호와 관련입니다.

2.『2021년 건설폐기물 처리용역(연간단가)』설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2021년 건설폐기물 처리용역(연간단가)

나. 용역기간 : 2021. 4. 21. ~ 12. 31.

다. 용역개요 : 건설폐기물(폐콘크리트 및 폐아스콘) 처리

라. 계 약 자 : ****************

마. 계약금액 : 금20,900,000원

바. 설계변경 내용

구 분		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공 급 가 액	금 19,000,000원	금 14,857,273원	감 4,142,727
	부가가치세	금 1,900,000원	금 1,485,727원	감 414,273
	계	금 20,900,000원	금 16,343,000원	감 4,557,000

사. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 월드컵공원 시설물 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비

아. 변경사유 : 작업지시에 따른 물량 변경 및 중간집하장내 기존폐기물 처리

첨 부 : 1. 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부. 끝.

주무관	정종광		토건시설팀장	송석주		시설과장	代고봉채		서부공원녹지사업소장	12/13 代류기혁
협조자	재무팀장	양근대
시행	시설과-7516	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		/전송	300-5569	/		/	부분공개(5)