문서번호	수상기획과-7259
결재일자	2021. 12. 13.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

		시 민
주무관	수상기획과장	운영부장
박지정	박인수	12/13 이상이

마곡 승강장 설계변경(계약금액) 검토 보고

2021. 12.

수상기획과

「수상콜택시 승강장 위치 조정 공사」

마곡 승강장 설계변경(계약금액) 검토 보고

「수상콜택시 승강장 위치 조정 공사」마곡승강장 도교 연결방식 변경관련 실정보고 검토·승인에 따른 설계변경(계약금액 증가) 사항에 대해 보고드림.

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 수상콜택시 승강장 위치 조정 공사

○ 계약금액: ************

○ 공사기간: ****************************

○ 공사업체: *******

○ 계약방식: ******************************

□ 추진 사항

**************************************

********************************

*************************************

**************************

*******************************************

□ 설계변경 내용

○ 변경금액: 금***************************

구 분		공 사 비(원)		증 감
		당 초	변 경
도급액	공급가액	**********	**********	**********
	부가세	*********	*********	*********
총 공사비		**********	**********	**********

○ 변경사유: 도급자 공사 실정보고 검토 및 승인

- 노약자 장애인 이용불편(계단설치), 홍수위 승강장 이용 불가 등

- 승강장 기반 시설을 철재 → 콘크리트 변경(내구성 강화)

- 마곡 승강장 수상콜택시 외부 안내판 신규 설치

○ 변경내용: 호안가 하부 도교 연결 → 상부 데크 설치 도교 연결

품 명	세부내역	비고
*****	*******************	**
*******	**************** **************************	**
***********	************* ************************
********	************************
********	***********
*****	******	*

□ 향후 계획

○ 총무과에 설계변경(계약금액) 계약의뢰

○ 계약변경에 따른 준공검사

붙임  1. 설계변경(실정보고) 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.