문서번호	시설관리과-29636
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	동부수도사업소장
이혜진	김대용	송병욱	12/14 이재호
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

천호대로 장기사용 송배수관 정비공사

(설계변경에 따른 계약금액 조정)

2021. 12.

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2021년 천호대로 장기사용 송배수관 정비공사』

설계변경에 따른 계약금액 조정

공사현황

가. 공 사 명: 천호대로 장기사용 송배수관 정비공사

나. 공사개요: D=200~1200㎜, L=415m

다. 도급금액: 890,489,000원

라. 공사기간: 2021. 7. 1. ~ 2021. 12. 17.

마. 도 급 자: 정일이앤지(주) 대표 장인환

설계변경 근거 및 사유

가. 설계변경 관련규정

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법 시행령 제74조 (설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 , 행정자치부 예규 제67호(2016.10.4)

제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

나. 설계변경 사유

○ 토공, 부설공, 구조물공 등 시공물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 변경

○ 산재·고용보험료 등 제경비 변경 등

설계변경 공사개요

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증, 감
***	***********	*	***	***	****
******	**	**	*	*	****

설계변경 현황

가. 공사현장 상태와 설계서 상이로 인한 변경

연번	구 분(제목)	주요 변경내용	관 련 근 거
1	사토장 및 중간집하장	- 수도권매립지 반입불가로 인한 사토장 변경 및 중간집하장 변경	⦁공사감독2처-15079 (21.11.10.) ⦁시설관리과-27538 (21.11.19.)
2	관부설 노선변경	- 기존관 노선 지장물로 인한 반대차선으로 노선 변경	⦁공사감독2처-12672 (21.10.07.) ⦁시설관리과-27538 (21.11.19.)
3	기존관 철거 및 폐관충진 관련	- 지장물로 인한 기존관 철거 불가로 충진추가 작업	⦁공사감독2처-15095 (21.11.11.) ⦁시설관리과-27538 (21.11.19.)
4	횡단굴착 증가	- 지장물 증가 및 기존관 확인으로 횡단굴착 개소 증가	⦁공사감독2처-12276 (21.10.01.) ⦁시설관리과-27538 (21.11.19.)
5	1구간 시종점 및 분기부 시공방법 변경	- 시종점 및 분기부 기존관 접합부 강관이음 접합으로 변경	⦁공사감독2처-15919 (21.11.22.) ⦁시설관리과-29371 (21.12.10.)
6	기존관 폐쇄작업시 기존관 절단	- 충진관련 기존관 절단시 맹판설치 등 추가작업	⦁공사감독2처-16581 (21.12.01.) ⦁시설관리과-29371 (21.12.10.)
7	굴착심도 및 확폭	- 지장물 구간등 굴착심도 증가 및 확폭으로 토공량 증가	⦁공사감독2처-16952 (21.12.07.) ⦁시설관리과-29371 (21.12.10.)

나. 작업내용 변경 지시

연번	구 분(제목)	주요 변경내용	관 련 근 거
1	밸브 고장으로 분기부 연결 불가	- 1구간(신답철교 아래) 900/900분기부 기존밸브 고장으로 연결불가	⦁시설관리과-27533 (21.11.19.)

다. 제경비 등 실 사용에 따른 정산

연번	구 분	주요 변경내용	비 고
1	4대 보험료 정산 등	⦁건강, 연금, 노인장기, 퇴직공제부금 정산
2	고용개선 지원비 정산	⦁고용개선 지원비 실정산
3	관급자재비 정산	⦁심의 조치 결과보고 후 관급 추가 정산

주요공정 변경내용

공 종	규격	단위	당초	변경	증·감	비고
******	*********	*	***	***	*********
*******	**	*	***	***	*********

설계변경으로 인한 계약금액 조정

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	공 급 가 액	***********	***********	*************
	부가가치세	**********	**********	**************
	계	***********	***********	**************

향후 계획

가. 설계변경 심의위원회 개최

- 개최일자: 2021. 12. 14.(화)  10:00

- 개최장소: 시설관리과 사무실(3층)

- 참석위원: 시설관리과장 외 5인

- 검토내용: 물량 증·감 등의 적정성 및 신규공종의 단가산출 검토

나. 설계변경 심의위원회 개최결과에 따라 설계변경 시행하고 행정지원관로 변경계약 의뢰코자 함.

붙 임  1. 설계변경 사전심의 의뢰서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.