문서번호	시설관리과-24195
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
오영진		이승영	12/14 고신석
협조
	주무관		조익승

설계변경(제2회-최종) 검토 보고

(`21년 동작,영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

2021. 12.

남부수도사업소

시설관리과

설계변경(제2회-최종) 검토 보고

(`21년 동작,영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

「2021년 동작,영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)」업무수행 중 현장여건 변화에 따른 신규공종 및 계약물량 증·감 발생으로 설계변경을 시행하여 상수도공사 업무에 만전을 기하고자 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 동작,영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속 단가계약)

○ 공사개요 : 제수변 정비 176개소, 변실정비 80개소

○ 계약기간 :****************************

○ 계약금액 :***************

○ 계 약 자 :*********************

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부예규 제176호, 2021.9.6.) 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의 변경)-1(설계변경)-다‘의규정

□ 설계변경 사유

○ 공사시행 중 현장 시공여건 변화 및 소규모 상수도공사의 특수성(유충 등 유입방지대비 배수지 유지보수)으로 신규공종 및 물량변동(증·감) 발생

- 신규공종발생 : 거름망보수(2-7지) 등 99개공종

- 계약물량 증·감 : 아스팔트 포장절단(200㎜이하) 등 375개 공종

□ 설계변경 현황

○ 설계변경 금액

구 분	금 액		증·감	비고
	당 초	변 경
공급가액	************	**************	**************
부가가치세	***********	************	*************
도 급 비	*************	**************	**************

□ 조치계획

○ 도급비가 계약금액(************)보다 *********************으로 증액됨에 따라 본부(안전조사과)에 계약금액 조정심사 이행

○ 본부 설계변경 계약금액 조정심사 결과에 따라 설계변경 시행 및 정산시행

붙 임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계 검증확인서 1부.  끝.