문서번호	도로보수과-11143
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
이상구		12/14 김순수
협조

『2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)』

정산 실정보고에 따른 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)』 정산 실정보고에 따른 검토보고

『2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)』와 관련 1~9차 작업지시 완료보고에 따라 실 작업수량을 반영한 정산 실정보고임.

		관련근거

❍ 책임건설사업관리단 정산 실정보고[경동-2권역(북부)-2021-251(2021.12.14.)]

		공사개요

❍ 공 사 명: 2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-북부

❍ 공사기간: 2021. 3. 23. ~ 12. 31.

❍ 공사규모: 굴착복구 128a, 표층확폭복구 32a, 절삭후덧씌우기 350a

❍ 공 사 비: ***************************************

❍ 시 공 사: ****************

❍ 건설사업관리단 : ************

		보고내용

❍ 작업지시(1~9차) 작업완료 보고에 따른 시공물량 정산 반영

▶ 차수별 작업완료에 따라 실 작업수량 변경 발생

❍ 관급자재 및 폐기물 처리 물량 변경 반영

▶ 시공물량 정산에 따른 관급자재 및 폐아스콘 처리 물량 변경 발생

		주요 변경내용

❍ 공사비 변경내역

(단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증. 감	비 고
1. 포 장 공	1,389,808,778	2,345,541,394	955,732,616
2. 부 대 공	54,363,552	63,506,020	9,139,468
직 접 공 사 비	1,444,172,330	2,409,044,414	964,872,084
간 접 공 사 비	743,128,557	1,059,660,133	316,531,576
고용개선지원비	67,289,569	18,750,000	48,539,569
공 급 가 액	2,254,590,456	3,487,454,547	1,232,864,091
부 가 가 치 세	225,459,044	348,745,453	123,286,409
도 급 액	2,480,049,500	3,836,200,000	1,356,150,500
관 급 비	1,711,500,000	1,129,420,000	582,080,000
이 전 비	847,500,000	258,400,000	589,100,000
총 공 사 비	5,039,049,500	5,224,020,000	184,970,500	예산총액: 5,322백만원

❍ 주요공종 변경내역

공 종	단위	규 격	수량		증,감
			당초	변경
1.포장공
굴착복구(B-Type)	a	주간(10㎡이하), 41.4㎡/day,a당	1.00	-	1.00
굴착복구(B-Type)	a	주간(10㎡초과~20㎡이하), 45㎡/day,a당	1.00	-	1.00
굴착복구(B-Type)	a	주간(20㎡초과~30㎡이하), 49.05㎡/day,a당	1.00	-	1.00
굴착복구(B-Type)	a	주간(30㎡초과), 53.01㎡/day,a당	3.00	12.83	9.83
굴착복구(B-Type)	a	야간(10㎡이하), 41.4㎡/day,a당	1.00	0.29	0.71
굴착복구(B-Type)	a	야간(10㎡초과~20㎡이하), 45㎡/day,a당	2.00	4.88	2.88
굴착복구(B-Type)	a	야간(20㎡초과~30㎡이하), 49.05㎡/day,a당	5.00	13.35	8.35
굴착복구(B-Type)	a	야간(30㎡초과), 53.01㎡/day,a당	112.00	208.14	96.14
굴착복구(A-Type)	a	야간(48㎡초과), 129.8㎡/day,a당	2.00	0.93	1.07
표층확폭복구(B-Type)	a	야간,t=5cm 15㎡이하, 110.6㎡/day,a당	2.00	-	2.00
표층확폭복구(B-Type)	a	야간,t=5cm 15㎡초과~ 30㎡이하,124.6㎡/day,a당	5.00	-	5.00

표층확폭복구(B-Type)	a	야간,t=5cm 30㎡초과~ 60㎡이하,140㎡/day,a당	5.00	2.39	2.61
표층확폭복구(B-Type)	a	야간,t=5cm 60㎡초과, 176.4㎡/day,a당	20.00	16.41	3.59
절삭 후 덧씌우기 (A-Type)	a	야간,t=5cm,50a기준,a당	50.00	-	50.00
절삭 후 덧씌우기 (B-Type)	a	주간,t=5cm,34a기준,a당	-	7.44	7.44
절삭 후 덧씌우기 (B-Type)	a	야간,t=5cm,34a기준,a당	150.00	434.02	284.02
절삭 후 덧씌우기 (C-Type)	a	야간,t=5cm,18a기준,a당	150.00	68.96	81.04
그루빙	a	종절단 9*51*4,㎡당	100	470	370
쏠라표지병	개	125*40mm	-	92	92

❍ 관급자재 변경내역

품명	규격	단위	수량		증·감
			당초	변경
아스콘(순환)	BB-2(기층용)	톤	9,800	11,526	1,726
아스콘(순환)	WC-2(표층용)	톤	1,400	208	1,192
아스콘(순환)	WC-4(표층용)	톤	7,041	953	6,088
아스콘(1등급)	WC-3, t=20mm	톤	4,000	5,179	1,179
고내구성 아스콘	SMA(PG64-22)	톤	1,000	-	1,000
	개질SMA(PG76-22)	톤	1,000	-	1,000
미끄럼방지포장재	t=3mm	㎡	3,000	590	2,410

❍ 폐기물 변경내역

공 종	규격	단위	수량		증·감
			당초	변경
운반 및 처리	폐아스콘	톤	8,133	6,219	1,914

		책임건설사업관리 기술자 검토의견

❍ 작업지시서 및 실 작업수량에 의한 정산이 타당하다고 판단됨

		조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 실 작업 수량을 반영하여 낙찰차액(금282백만원)을 포함한 예산(5,322백만원) 범위내에서 정산 설계변경 하고자 함.

붙임  1. 감리단 정산 실정보고서 1부

2. 정산 변경내역서(2회,최종) 1부.  끝.