등록번호	도로시설과-13463		주무관		도로관리팀장	도로시설과장		생활도시친화국장
등록일자	2021.12.14.
			최지훈		권익생	김규엽		12/14 유철호
결재일자	2021.12.14.
공개구분	대시민공개
			협조
- 2021년 차도유지보수공사(연간단가) - 제2차 설계변경(정산) 검토 보고
생활도시친화국 도 로 시 설 과

- 2021년 차도유지보수공사(연간단가) -

제2차 설계변경(정산) 검토 보고

『2021년 차도유지보수공사(연간단가)』 사업 추진 중 황학동·신당동·동화동 동정부 사업 등 추가공사에 따른 공종별 물량 증·감 사항이 발생되어 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

1		관련 근거

□ 제5~6차 작업지시 시행

□ 중앙시장 과속방지턱 설치 사업 발주 의뢰[황학동-8672호(2021.9.1.)]

□ 공사 의뢰(2021년 안전한 통학로 조성사업)[교통행정과-79882호(2021.9.3.)]

□ 다산로33길(아리랑고개) 도로환경개선 공사 계획[신당동-10211호(2021.10.5.)]

□ 퇴계로86가길 노후 이면도로 보수 계획[동화동-10065호(2021.10.8.)]

□ 명동 애니타운 상징거리 조성사업 집행잔액 활용계획[도로시설과-12319호(2021.11.15.)]

2		공사 개요

□ 공  사  명 : 2021년 차도유지보수공사(연간단가)

□ 공 사 기 간 : 2021. 3. 18. ~ 2021. 12. 31.

□ 공 사 내 용 : 아스팔트포장 149a,  콘크리트포장 5a,  경계석 정비 160m

□ 계약상대자 : 원하건설㈜  대표 박준상

□ 공  사  비 : 927,020,000원

총공사비	도급비	관급비	폐기물 및 이전비	비 고
927,020,000원	720,856,210원	171,248,232원	34,915,558원

3		보고 내용

□ 설계변경 사유

❍ 황학동·신당동·동화동「노후 이면도로 재포장 공사 동정부 사업」 및 교통행정과「2021년 안전한 통학로 조성사업」 등 추가공사 추진에 따른 목적수량 증가

❍ 관내 주민불편 민원 사항 및 노후 도로 정비공사 추진에 따른 물량 증·감

□ 설계변경 내용

❍ 주요 공사물량 증·감

공 종	단위	물량변경			비고
		당초	변경	증 · 감
아스팔트 포장	a	149	227	증) 78
측구보수	m	100	250	증) 150
맨홀인상(648mm)	개소	22	44	증) 22
차선도색	㎡	570	1,842	증) 1,272

❍ 공사금액 변경

구 분	당초금액	변경금액	증 · 감 액		비고
			증	감
총공사비	927,020,000	1,183,467,780	256,447,780
도 급 비	720,856,210	816,100,000	95,243,790
관 급 비	117,248,232	311,259,880	140,011,648
이 전 비	34,915,558	56,107,900	21,192,342

4		조치 계획

□ 상기 설계변경 검토내용과 같이 공사 중 발생된 공종별 물량 증 · 감 사항을 반영하여 설계변경(정산) 시행코자 함.

※ 이전비(폐기물 처리비)는 ‘2021년 도로관리사업 건설폐기물 처리용역’에 통합·정산

※ 예산 상황을 고려하여 미끄럼방지 포장재 등 도로유지보수 공사용 관급자재 구입

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 일상감사 및 계약심사 결과 1부.

4. 예산현황 1부.  끝.