문서번호	토목과-17781
결재일자	2021.12.14.
공개여부	부분공개
방침번호

★주무관		토목팀장		토목과장		안전건설교통국장
이기웅		성규상		이호진		12/14 최연우
협조
	재무과장		송경택
	계약팀장		이은술

★ ◉

장안평일대 가로환경개선공사

설계변경(정산) 시행 보고

( 토 목 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [√] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

장안평일대 가로환경개선공사

설계변경(정산) 시행 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명: 장안평일대 가로환경개선공사

○ 공사기간: 2020.12. 28. ∼ 2021. 12. 30.

○ 도 급 자: 쓰리엠이엔씨(주) 대표 김수정

○ 공 사 비: 금1,758,000,000원

(도급비 1,261,999천원, 관급비 349,929천원, 이전비 146,372천원)

□ 설계변경 사유

○ 정산에 따른 공종별 물량 증감 발생

○ 추가구간 및 기타 변경사항 발생

- 장안평일대 가로환경 현안사항 보고(토목과-17197호, 2021.12.6.)

○ 사토장 변경

- 수도권매립지를 기준으로 설계하였으나 반출이 불가하여 사토가 가능한 일반매립지 변경(운반거리 52㎞→69.3㎞)

- 운반비는 증가하나 입찰공고시 조건에 따라 당초단가 적용

○ 건강·연금보험료 등 제경비 정산 시행

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사유로 공종별 변경된 사항에 대하여 첨부된 변경내역서와 같이 설계변경 및 정산 처리코자 함.

○ 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ㆍ 감		비 고
총공사비	1,758,000,000	1,873,814,290	증	115,814,290
도 급 비	1,261,999,000	1,295,880,000	증	33,881,000
관 급 비	349,629,400	365,450,060	증	15,820,660
이 전 비	146,371,600	212,484,230	증	66,112,630

붙임  1. 변경설계서 1부.
2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 관련보고서 1부.  끝.