“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	「2021년 정수처리시설 청소용역」설계변경 심의회 개최

우리 센터 정수처리시설 청소용역에 대하여 설계변경 사항이 발생되어 설계변경 심의회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.

1. 일반현황

○ 용 역 명 : 2021년 강북아리수정수센터 정수처리시설 청소용역

○ 용역개요

- 계 약 자 : 새암환경 (대표자 김정숙)

- 계약기간 : 2021. 3. 15. ∼ 2021. 12. 24.

- 작업물량 : 주벽 청소 254,969㎡, 슬러지 청소 3,620㎥ 등

○ 계약금액

- 당초 : 253,325,000원

- 변경 : 218,931,000원 (감34,394,000원, 당초대비 86.4%)

2. 변경사유 및 변경내역 : 붙임1. 청소용역(설계변경) 심의 요구서 참조

3. 심의회 개최

○ 심의일시 : 2021. 12. 13.(월) 10:00

○ 심의장소 : 정수과 사무실

○ 심의위원장 : 정수과장 김경희

○ 심의위원 : 환경6급 조성연, 환경6급 이승열, 전문경력관 이기만, 전문경력관 김용식

4. 심의내용

○ 단가산출 적정여부 등 설계변경의 타당성

○ 계약변동(증․감)물량 계약단가 낙찰율 적용범위(± 3%)내 적용 적정여부

○ 제경비 적정 산정 및 적용 적정 여부

○ 기타 제반규정 적정 준수 여부

붙임 1. 청소용역 심의요구서 1부.

2. 설계변경 내역서 2부.

3. 검증확인서 1부.  끝.

주무관	구연회		정수과장	代조성연		강북아리수정수센터소장	12/10 신동호
협조자	주무관	김용식
시행	정수과-3814	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171 (삼패동)	/
전화	02-3146-5846	/전송	02-3146-5807	/	younhoi@seoul.go.kr	/	대시민공개