투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	휘경유수지 CSOs 저류조 설치사업 관련용역 변경계약 의뢰

「휘경유수지 CSOs 저류조 설치사업」관련 건설사업관리(설계단계) 용역 및 소규모 지하안전영향평가 용역을 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

구 분	휘경유수지 CSOs 저류조 설치사업 건설사업관리(설계단계) 용역	휘경유수지 CSOs 저류조 설치사업 소규모 지하안전영향평가 용역
계약사	㈜태조엔지니어링 (대표: 한명식)	셀파이엔씨㈜ (대표: 곽정하)
용역비	184,490,000원	41,963,300원
용역기간	‘20.11.4.∼’21.9.4.(‘21.7.9.일시중지)	‘21.3.1.∼’21.8.27.(‘21.7.9.일시중지)

나. 변경사유 : 사업추진 타당성 부족에 따른 타절정산

다. 변경내역

(단위 ; 원)

구 분	휘경유수지 CSOs 저류조 설치사업 건설사업관리(설계단계) 용역	휘경유수지 CSOs 저류조 설치사업 소규모 지하안전영향평가 용역	비고
계약사	㈜태조엔지니어링 (대표: 한명식)	셀파이엔씨㈜ (대표: 곽정하)
용역비	***************** ***************** *****************	***************** ******************** ****************

라. 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한물관리, 물환경개선및관리, 휘경유수지 CSOs 저류조설치, 시설비및부대비

붙임   1. 방침서 1부.

2. 내역서 1부

3. 용역 계약해지 및 타절준공 합의서 각 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	유시혁		환경시설과장	오열상		방재시설부장	12/10 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-15775	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5 7)