“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(영등포 정밀안전진단 용역)

상수도사업본부(생산부)와 계약 체결하여 시행중에 있는 영등포정수센터 시설물 정밀안전진단 용역에 대하여 다음과 같이 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 영등포아리수정수센터 취, 정수 시설물 정밀안전진단 용역

나. 용역업체 : 반석안전주식회사, (사)대한산업안전협회

다. 계약금액 : 금172,166,000원(금일억칠천이백일십육만육천원)

라. 계약기간 : 2021.2.9.~12.31

마. 설계변경 내용

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증(△), 감(▽)	비 고
1. 정밀안전진단		156,514,545	181,818,182	△27,834,000
	가. 정밀안전진단	156,514,545	156,514,545	-
	나. 내진성능평가	-	25,303,637	△25,303,637	신규
2. 부가가치세		15,651,455	18,181,818	△2,530,363
3. 총 용역비		172,166,000	200,000,000	△27,834,000

바. 설계변경 사유 : 추가 과업 시행(1정수장 고도시설 내진성능평가)

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지비(정수센터 시설 유지보수)

※ 선급 지급(금86,083,000원) : 재무회계과-3667(2021.3.17.)

붙임 : 1. 설계변경 시행 품의서 1부.

2. 실정보고 검토서 1부

3. 변경내역서 1부

4. 합의서 1부.  끝.

	생산부장
주무관	김영규		생산관리과장	신근호		생산부장	12/13 代신근호
협조자
시행	생산관리과-12040	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 생산부(생산관리과)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	kyk76091@seoul.go.kr	/	부분공개(5)