“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(영등포 취, 정수 시설물 정밀안전진단 용역)

상수도사업본부(생산부)와 계약 체결하여 시행중에 있는 영등포정수센터 시설물 정밀안전진단 용역에 대하여 건설기술심의(12.10일, 조건부 채택) 완료 후 다음과 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 영등포아리수정수센터 취, 정수 시설물 정밀안전진단 용역

나. 용역업체 : 반석안전주식회사, (사)대한산업안전협회

다. 계약금액 : 금172,166,000원(금일억칠천이백일십육만육천원)

라. 계약기간 : 2021.2.9.~12.31

마. 설계변경 내용

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증(△), 감(▽)	비 고
1. 정밀안전진단		156,514,545	181,818,182	△27,834,000
	가. 정밀안전진단	156,514,545	156,514,545	-
	나. 내진성능평가	-	25,303,637	△25,303,637	신규
2. 부가가치세		15,651,455	18,181,818	△2,530,363
3. 총 용역비		172,166,000	200,000,000	△27,834,000

바. 설계변경 사유 : 추가 과업 시행(1정수장 고도시설 내진성능평가)

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지비(정수센터 시설 유지보수)

※ 선급 지급(금86,083,000원) : 재무회계과-3667(2021.3.17.)

붙임 : 1. 실정보고 검토서 1부

2. 변경내역서 1부

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	김영규		생산관리과장	신근호		생산부장	代신근호		상수도사업본부부본부장	12/13 구아미
협조자	주무관	정보례		주무관	김진수		예산팀장	홍경숙
재무회계과장	이민제
시행	생산관리과-12034	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 생산부(생산관리과)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	kyk76091@seoul.go.kr	/	부분공개(4)