문서번호	시설관리과-20439
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이동규	김재영	12/14 代김진성
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고 (2021년 서초구 관내 배급수관 정비공사 건설폐기물 처리용역)

2021. 12.

강남수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리사업소에서 시행 중인「2021년 서초구 관내 배급수관 정비공사 건설폐기물 처리용역」에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 심의위원회 개최 현황

○ 건    명 : 2021년 서초구 관내 배급수관 정비공사 건설폐기물 처리용역

○ 개최일시 : 2021.12.14.(화) 15:00

○ 위 원 장 : 시설관리과장

○ 심의위원 : 급수운영팀장, 급수관리팀장, 안전관리팀장, 시설관리팀장

○ 심의내용 : 설계변경 적정성 여부

□ 심의결과

○ 심의의견

구 분	성 명	의 견	서 명	비 고
위원장	시설관리과장 김근태	적 정	김 진 성	代
위 원	급수운영팀장 이승우	적 정	이 승 우
위 원	급수관리팀장 전동근	적 정	전 동 근
위 원	안전관리팀장 홍정식	적 정	홍 정 식
위 원	시설관리팀장 김재영	적 정	김 재 영

□ 설계변경 사유 및 주요 세부내용

○ 설계변경 근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 설계변경 사유

- 각 공사 현장의 여건 변동에 따른 공종별 계약물량 증·감 사항 발생

○ 주요 세부내용

- 건설폐기물 운반, 처리 증·감 현황

구 분	운 반(㎥)			처 리(톤)			비고
	당 초	변 경	증 · 감	당 초	변 경	증 · 감
계	279	311	증)32	655	729	증)74
폐아스팔트	278	160	감)118	653	375	감)278
폐콘크리트	1	151	증)150	2	354	증)352

□ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	증 ․ 감
도 급 비	26,163,800	28,367,000	증)2,203,200
공급가액	23,785,273	25,788,182	증)2,002,909
부가가치세	2,378,527	2,578,818	증)200,291

□ 조치계획

○ 상기와 같이 설계변경 심의 시 설계사유(운반, 처리물량 증·감 등)에 대하여 검토결과 산출 및 낙찰율 등을 적정하게 적용하여 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  1. 설계변경 심의 요청서 1부.

2. 설계변경 심의 의견서 1부.

3. 변경내역서 1부.  끝.