문서번호	교통운영과-17743
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고승희		박성재	12/14 강진동
협조
	주무관		이윤재

2021년 교통안전시설물 설치공사 실시설계(노면표시등)

용역(강남권) 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.   12.

2021년 교통안전시설물 설치공사 실시설계(노면표시 등) 용역(강남권) 설계변경 보고

2021년 교통안전시설물 설치공사 실시설계(노면표시 등) 용역(강남권) 완료에 따른 설계변경 요청이 있어 이에 대한 검토결과를 보고함.

▢ 용역개요

○ 용 역 명 : 2021년 교통안전시설물 설치공사 실시설계(노면표시 등)  용역(강남권)

○ 용역기간 : 2021.02.15. ~ 2021.12.31.

○ 계약업체 : ***************

○ 계약금액 : *************

○ 용역내용 : 서울지방경찰청 교통안전시설 규제심의 관련 실시설계

강북권역(서부, 북부, 성동도로사업소 및 14개 자치구)에서 발생되는 교통안전시설 개선사항 및 유지보수에 대한 실시설계

▢ 실시설계 완료현황

○ 설계기간 : 2021.02.15. ~ 2021.12.31.

○ 설계내역 : *****

경찰청 교통안전시설 심의 가결 실시설계 :*****

구 분	노면표시	안전표지	합계(비고)
설계건수	****	****	******
공사금액	***********	*********	***********

▢ 실시설계 완료현황

○ 용역 변경 금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계약금액	************	***********	*************

○ 변경사유

교통안전시설물 규제심의 가결(강남권)건수 감소로 설계금액 변경 및 정산

▢ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이『2021년 교통안전시설물 설치공사 실시설계

(노면표시 등) 용역(강남권)』에 대하여 설계변경을 시행하고자 함

○ 예산과목(교통사업특별회계)

도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통안전표지 설치 및 유지보수, 시설비

▢ 향후 추진계획

○ 재무과로 설계변경 계약 의뢰

○ 변경계약 후 준공

붙임  1. 설계변경요청 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 실시설계 완료현황 보고서 1부.

4. 2021년 교통안전시설물 총괄내역 및 물량표 1부.

5. 합의각서 1부. 끝.