문서번호	정수시설과-12002
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		정수시설과장		암사아리수정수센터소장
문소현		전훈		12/14 조성태
협 조

「2021년 제초작업 및 조경관리용역」

설계변경 및 계약금액 조정시행

2021. 12.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『2021년 제초작업 및 조경관리용역』

설계변경 및 계약금액 조정시행

「2021년 제초작업 및 조경관리용역」에 대해 설계변경 및 계약금액     조정을 시행코자 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		공사개요

□ 용 역 명 : 2021년 제초작업 및 조경관리용역

□ 용역기간 : 2021. 3. 11. ~ 2021. 12. 17.

□ *************************

******************

***************************

□ 용역내용

공 종 명	수 량	횟 수		공 종 명	수 량	횟 수
잔디깍기	239,296m2	4		일반전정	380주	수시
풀깍기	149,732m2	4		수목(관목)식재	300주	수시
풀뽑기	50,460m2	수시		초화류 식재	1,000본	수시
관목전정	4,628m2	수시		수목이식	20주	수시

□ **********************

Ⅱ		설계변경 내용 및 사유

□ 용역물량 증∙감 내역

구분	공 종	규 격	단위	물 량 내 역		증 ․ 감
				당 초	변 경
제초 및 풀깍기	잔디깍기	핸드가이드, 승용식, 배부식	㎡	239,296	239,296	-
	풀깍기	배부식	㎡	149,732	149,732	-
	풀뽑기	인력	㎡	50,460	50,460	-
전정 작업	일반전정	낙엽수, 상록수	주	380	380	-
	관목전정	-	㎡	4,628	4,628	-
	관목및수목제거	-	주	270	218	(-)52
	수목 이식	-	주	20	0	(-)20
	넝쿨 및 위해식물제거 등	-	인	58	119	(+)61
	가로수 전정	강전정	주	0	92	(+)92
식재	관목 식재	H=0.3~0.7m	주	300	300	-
	초화류 식재	4치(포트)	본	1,000	1,360	(+)360
	잔디 식재	줄떼 및 종자살포	㎡	0	1,170	(+)1,170
제비율제외	관목 및 잔재정리	-	회	3	13	(+)10

□ 신규공종 발생

구분	공 종	규격
가로수 전정	강전정/흉고11~21cm미만	30주
	강전정/흉고21~31cm미만	32주
	강전정/흉고31~41cm미만	18주
	강전정/흉고41~51cm미만	12주
잔디 식재	줄떼	300㎡
	종자살포	870㎡

□ 각종 제비율 정산

❍ 보험료 사후정산(납입확인서 미제출에 따른 감액)

- 국민건강 보험료 : **************

- 국민연금 보험료 : **************

- 노인장기 요양보험료 : ************

- 임금채권보장보험료 : ***********

(※임금채권보장보험료는 산재보험료에 합산)

❍ 기타 제잡비 정산

□ 공종별 증∙감 내역

(단위: 원)

공 종	도 급 액		증 ․ 감	주요변경 사유
	당초	변경
도 급 액	***********	***********	*************	시공물량 증·감
제초 및 풀깍기	**********	**********	*	-
전정 작업	**********	**********	*************	시공물량 증·감
식재	*********	*********	************	시공물량 증·감
사급자재비	*********	*********	**********	자재물량 증·감
제비율제외공종	*********	*********	************	시공물량 증·감
보험 및 제잡비	**********	**********	************	납입내역 사후정산

□ 계약금액 변경(조정) 내역

(단위: 원)

구 분	당초	변경	증․감	비고
도급비	***********	***********	**********	*********

Ⅲ		조치의견

□ 설계변경 증액분 예산 집행

❍ 설계변경 증액 금액 : ***********

❍ 예산 조치계획

- 「2021년 제초작업 및 조경관리용역」예산확보 계획 및 설계변경 검토보고

(정수시설과-11964, 2021.12.13.)

※본사업 낙찰차액 및 수선유지비 집행잔액 사용

(단위: 원)

구 분			예산액	예산과목
설계변경 증액분	**********	낙찰 차액	*********	정수비,정수센터시설유지보수, 수선유지교체비,수선유지비 「2021년 제초작업 및 조경관리용역」
		집행 잔액	*********	정수비,정수센터시설유지보수, 수선유지교체비,수선유지비 「CCTV설비 유지관리」

□ 설계변경 시행 및 계약의뢰(행정관리과)

붙임  설계변경내역서 1부.  끝.