문서번호	토목부-23325
결재일자	2021. 12. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
김현중	한병찬	12/14 임춘근

설계 및 건설사업관리 용역 벌점부과 검토보고

≪성동교 확장 및 진입램프 신설 기본 및 실시설계≫

2021. 12.

도시기반시설본부

(토목부)

설계 및 건설사업관리 용역 벌점부과 검토보고

≪성동교 확장 및 진입램프 신설 기본 및 실시설계≫

「성동교 확장 및 진입램프 신설 기본 및 실시설계」특정공법 선정 재검토 결과에 따른 건설엔지니어링과 건설사업관리 용역업자 및 건설기술자에 대한 벌점 부과 검토보고임.

□ 관련규정

○ 건설기술진흥법 제53조(건설공사 등의 부실 측정) 및 같은 법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실측정에 따른 벌점 부과 등)

○ 벌점 심의절차 개선 계획(안)(2021. 2. 16. 도시기반시설본부 총무부-2888)

□ 용역개요

○ 위    치 : 성동구 성동교 일대

○ 용역규모 : 성동교 확장 1차로(폭 7차로→8차로, 연장 230m), 진입램프 신설 1개소(B=5m, L=112m) 설치

○ 사업기간 : 2020. ~ 2024.(설계 ′20. 8. ~ ′22. 4.)

○ 계약금액 : 489,819,000원

○ 설 계 사 : ㈜수성엔지니어링 외 1개사

○ 설계감리 : ㈜서우티이씨

○ 조 직 도

▶ 과업수행 설계사 : (주)수성엔지니어링(55%), (주)진우엔지니어링코리아(45%)

▶ 과업수행 구성

****	****	****	****	*****	****
*******	*******	*******	*******	*******	*******

□ 추진경위

○ ’21. 3. 9 : 전문가 자문회의

- 상부 구조 형식은 기존 교량과 동일한 형식 적용 의견 제시

○ ’21. 6. 1. ∼  6. 11. : 특정기술 전수조사(설계사, 건설알림이 및 협회 등)

- ‘Preflex 거더’ 12개 기술 중 6개 기술 선정(참여여부 조사 등)

○ ’21. 7. 6. : 특정기술 심사 검토 요청(설계사 → 설계 감리)

- 입찰안내문, 심사 요청서, 심사안건 개요, 사전검토서 등 심사자료

○ ’21. 7. 6.   : 특정기술 검토 후 심사 상정 의뢰(설계감리 → 도기본)

○ ’21. 7. 22. : 심사위원회 개최 계획 수립

○ ’21. 7. 22. : 특정기술 심사 입찰안내문 배포(설계사 → 6개 선정 업체)

○ ’21. 7. 28. : 가격입찰 평가 (도기본 토목부 회의실)

○ ’21. 8.  4.  : 특정기술 선정 심사위원회 개최********************

*********************************************

******************************************************************

**********************************************

***********************************

********************************

***************************************

************************************

*********************************************

□ 검토의견

****************************************

**********************************************************

○ 업무 차질에 따른 부실벌점 부과(0.5점)

- 정당한 사유없이 건설엔지니어링 참여기술인의 업무 소흘로 설계용역 계획공정에 차질이 발생하였으므로 건설엔지니어링과 건설사업관리 용역사업자 및 참여기술인에 각각 부실벌점(0.5점) 부과

※ 관련근거 : 「건설기술진흥법 시행령」(제87조 제5항)[별표 8] 건설공사 등의 벌점관리기준

- 건설기술용역업자

가. 건설엔지니어링(참여비율에 따라 차등 부과)

구분	총계	㈜수성엔지니어링	㈜진우엔지니어링코리아
지분율	100%	55.0%	45.0%
벌점	0.5	0.275	0.225

나. 건설사업관리

구분	㈜서우티이씨
지분율	100%
벌점	0.5

- 건설기술자

구분	㈜서우티이씨 (책임건설사업관리기술자)	㈜수성엔지니어링 (사업책임기술자)	㈜진우엔지니어링 (분야별책임기술자)	㈜수성엔지니어링 (분야별참여기술인)
성명	문준철	이정학	김선일	설종명
벌점	0.5	0.5	0.5	0.5

□ 조치의견

○ 이와 같이 본부 부실벌점부과위원회에 상정하여 처분결과에 따라 조치(2021. 12월 중)

붙임  1. 관련 공문

2. 특정기술(상부거더) 선정 재검토 보고.  끝.