“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2021년 금천구 관내 상수도공사(2차수))

우리사업소에서 시행중인 『2021년 금천구 관내 상수도공사(2차수)』에 대하여 설계변경 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 금천구 관내 상수도공사(단가계약)

나. 계 약 자 : 옹동건설㈜  대표자 원창희

다. 공사기간 : 2021.6.8. ~ 2022.6.30

라. 공사개요 : D=15~300mm, L=1,997m

마. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총부기금액	855,593,010	855,593,010	변동 없음
1차수금액	573,702,000	617,188,000	증 43,486,000	2021년
2차수금액	281,891,010	238,405,010	감 43,486,000	2022년

바. 설계변경 사유 : 공종별 물량 증,감

사. 예산과목 : 상수도사업비용.영업비용,급수공사비,신설공사비(급수공사)

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비(장기사용 배급수관)

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비(보온재)

소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설등의 설치 및 보수(소화전보수)

붙임  1) 설계변경 심의결과보고 및 심의의결서 각1부.

2) 변경내역서 및 합의서 각1부.  끝.

주무관	김태승		급수관리팀장	류태현		급수운영과장	이용구		남부수도사업소장	12/15 박병성
협조자	행정지원과장	홍기관
시행	급수운영과-20971	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4545	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(5)