문서번호	주거환경과-5125
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주거환경계획팀장	주거환경과장
김창옥	이상구	12/15 代승효선

옥인동 앵커시설 추가설계용역

준공기한 연기 검토보고

2021. 12.

옥인동 앵커시설 추가설계용역

준공기한 연기 검토보고

옥인동 앵커시설 추가설계 용역 추진과 관련하여 주민의견을 반영한 공간계획 재구성에 대한 주민의견 수렴 등 면밀한 검토를 위해 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 함

□ 용역 개요

○ 용 역 명: 옥인동 앵커시설 추가설계 용역

○ 용 역 사: **********

○ 계약금액: ********************

○ 계약기간: 2021. 3. 17.~ 12. 31.

※ 1차 준공기한 연기: 5. 16. → 6. 30.

※ 2차 준공기한 연기: 6. 30. → 8. 31.

※ 3차 준공기한 연기: 8. 30. → 11. 30.

※ 4차 준공기한 연기: 11. 30. → 12. 31.

○ 과업내용 : 주민의견을 반영한 공간계획 재검토

□ 추진 경위

○ ’21. 3. 17.: 용역계약 체결

□ 변경 사항

구 분	당 초	변경	비 고
준공기한	’21. 12. 31.	’22. 2. 28.	계약금액 변경 없음

□ 검토 의견

*********************************************************************************************************************

*************

***********

□ 향후 계획

○ ’21. 12.: 잔여 예산 사고이월

○ ’22. 2.: 용역 준공

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 과업내용서(변경) 1부.  끝.