문서번호	정수시설과-9360
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
이민화		이천영	12/15 이달영
협 조

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

2021년 전기설비 유지보수 공사(장기계속) 설계변경 보고

2021. 12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 광암아리수정수센터

전기설비 유지보수 공사(장기계속) 설계변경 보고

우리 정수센터에서 시행 중인『2021년 전기설비 유지보수 공사』의 물량 증․감 및 신규공종이 발생하여 아래와 같이 설계 변경을 시행하고자 함

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2021년 광암아리수정수센터 전기설비 유지보수 공사

○ *********************************

○ *******************

- *******************************

- ******************************

○ 계약업체 : ******************

○ 공사내용 : 정수센터 전기설비 예방정비 및 고장 발생시 긴급 보수

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 작업지시에 따른 시공 물량 증․감 및 신규공종 발생, 보험료 등 제경비 정산

○ 계약금액

구 분		당초 금액	변경 금액	증‧감 금액	비고
총 공 사 비		59,593,270원	52,633,740원	감)6,959,530원
도급비	1차년도 (2021년)	50,593,270원	43,633,740원	감)6,959,530원
	2차년도 (2022년)	9,000,000원	9,000,000원	변경 없음

○ 신규공종 주요내용

- 사여과지 및 회수조 포충기 신설 9개소

- 사여과지, 활성탄흡착지 샘플링펌프 및 밸브 전원 공사

- 보안등기구 교체 21개소, 동작센서등 교체 6개소

- 약품탱크, 유지관리동 피뢰설비 접지선로 보강 등

※ 세부사항 설계변경내역서 붙임 참조

□ 조치의견

○ 작업지시 완료 작업 건에 대해 실제 시공물량 정산 및 신규발생 공종들을 반영하고 보험료 등 제경비 정산을 위해 계약금액 변경하고자 하며,

○ 상기 변경 사항에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최 후 심의 결과를 반영하여 변경 계약 및 1차 계약에 대해 준공처리하고자 함.

□ 향후계획

○ 설계변경 심의위원회 개최

- 개최일시 : 2021. 12. 16.(목) 10:00 ~

- 심의위원

· 위원장 : 정수시설과장

· 위  원 : 공업6급 고명규, 공업6급 신왕근, 시설6급 송재홍

- 주요 심의내용

· 설계변경 타당성

· 공종별 물량변경에 따른 설계변경의 적정성

○ 설계변경 및 변경계약

○ 1차 계약 준공처리

붙임 1. 설계변경 내역서(총차, 1차) 1부.

2. 설계변경 검토의뢰서 1부.

3. 설계변경 심의위원회 개최의견서 1부.

4. 검증확인서 1부.  끝.