문서번호	급수운영과-21010
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	급수운영팀장	급수운영과장
조승수	서규석	12/15 이용구
협 조

설계변경 검토보고 (제2회)

(2021년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사))

2021. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 검토보고 (제2회)

(2021년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사))

「2021년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사)」 업무수행 중 현장 시공여건 변화에 따른  신규공종 및 물량 증 ․ 감이 발생됨에 따라 설계변경을 시행하여 공사업무에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사)

○ 계약기간 : 2021. 4. 30. ~ 2022. 6. 30.

○ 계 약 자 : 만보이엔씨(주) 대표자 김광운

○ 계약금액 : 금813,648,100원

○ 공사개요 : D=13~300㎜, L=1,463m

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

□ 설계변경 사유

○ 공사 시행중 현장 시공여건 변화 및 연간단가계약 공사의 특수성으로

신규공종과 물량변동(증 ․ 감) 발생

- 신규공종 : 「싸인보드카세(정차시)」 1개 공종

- 물량증가 : 「콘크리트포장절단(200mm이하,지세)」 외 92개 공종

- 물량감소 : 「원형밸브시 설치공(기초CON)」 외 55개 공종

□ 설계변경 현황 (전체)

○ 계약금액 변경 - 변동없음

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	739,680,091	739,680,091	0
부가가치세	73,968,009	73,968,009	0
도 급 비	813,648,100	813,648,100	0

○ 공사개요 변경 - 변동없음

구 분	당 초	변 경
공사개요	D=13~300㎜, L=1,463m	D=13~300㎜, L= 1,463m

○ 주요 신규공종 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
싸인보드카	정차시	일	-	1	104,729

○ 주요 물량 증 ․ 감 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
콘크리트깨기	소형브레이커, 지세	㎥	22	48	3,150,004
터파기(기계100%)불량	굴삭기(타이어)0.18m3,지세	㎥	555	788	3,049,038
잔토처리(0.7상차비별도)	24DT,집하장→매립지(49.2km)	㎥	600	775	3,376,275
주철직관 부설	D=80mm~300mm	개소	531	592	365,595
주철(이형관) 부설	D=80mm~300mm	개소	212	242	1,105,804
원형밸브실 설치공 (기초재활용플라스틱)	D=80mm~300mm	개소	62	48	-5,840,462

□ 설계변경 현황 (1차수)

○ 계약금액 변경 - 변동있음

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	533,540,000	478,960,000	-54,580,000
부가가치세	53,354,000	47,896,000	-5,458,000
도 급 비	586,894,000	526,856,000	-60,038,000

[※ 차수별 공사금액 변경사항]

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
총 부기금액	813,648,100	813,648,100	0
1차수	586,894,000	526,856,000	-60,038,000
2차수	226,754,100	286,792,100	60,038,000

○ 공사개요 변경 - 변동없음

구 분	당 초	변 경
공사개요	D=13~300㎜, L=1,026m	D=13~300㎜, L= 1,296m

○ 주요 신규공종 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
싸인보드카	정차시	일	-	1	104,729

○ 주요 물량 증 ․ 감 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
콘크리트깨기	소형브레이커, 지세	㎥	21	48	3,246,926
인력 터파기	견질토사 0-2m, 지세	㎥	41	87	1,914,074
인력 터파기(협소, 지장물)	견질토사 0-2m, 지세	㎥	320	429	6,175,586
잔토처리(0.7상차비별도)	24DT,집하장→매립지(49.2km)	㎥	448	775	6,306,881
주철(이형관) 부설	D=80mm~300mm	개소	190	216	844,829
원형밸브실 설치공 (기초재활용플라스틱)	D=80mm~300mm	개소	32	18	-5,923,002

□ 조치계획

○ 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하여

심의 결과에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 사전심의 요청서 각1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.