문서번호	도로보수과-11196
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이상구		김순수	12/15 고영준
협조

『2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)』

설계변경(2회,정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)』 설계변경(2회, 정산) 검토 보고

우리사업소에서 시행하는『2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)』와 관련하여 시공물량 증.감에 따른 설계변경(2회,정산) 검토결과 보고임.

		관련근거

❍ 책임건설사업관리단 설계변경(제2회,준공) 요청[경동 제2021-3321(2021.12.15.)]

		공사개요

❍ 공 사 명: 2021년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-북부

❍ 공사기간: 2021. 3. 23. ~ 12. 31.

❍ 공사규모: 굴착복구 128a, 표층확폭복구 32a, 절삭후덧씌우기 350a

❍ 공 사 비: ***************************************

❍ 시 공 사: ****************

❍ 건설사업관리단 : ************

		보고내용

❍ 굴착복구 및 절삭후덧씌우기 등 공종별 시공물량 증.감에 따른 변경

❍ 관급자재 및 폐기물 처리물량 증.감에 따른 변경

		주요 변경내용

❍ 공사비 변경내역

(단위 : 원)

공 종	공 사 금 액			비 고
	당 초	변 경	증. 감
총 공 사 비	5,039,049,500	5,224,020,000	184,970,500
도 급 액	2,480,049,500	3,836,200,000	1,356,150,500
관 급 비	1,711,500,000	1,129,420,000	582,080,000
이 전 비	847,500,000	258,400,000	589,100,000
총 공 사 비	5,039,049,500	5,224,020,000	184,970,500	,

❍ 주요공종 변경내역

공 종	단위	규 격	수량		증,감
			당초	변경
1.포장공
굴착복구(B-Type)	a	주간(10㎡이하), 41.4㎡/day,a당	1.00	-	1.00
굴착복구(B-Type)	a	주간(10㎡초과~20㎡이하), 45㎡/day,a당	1.00	-	1.00
굴착복구(B-Type)	a	주간(20㎡초과~30㎡이하), 49.05㎡/day,a당	1.00	-	1.00
굴착복구(B-Type)	a	주간(30㎡초과), 53.01㎡/day,a당	3.00	12.83	9.83
굴착복구(B-Type)	a	야간(10㎡이하), 41.4㎡/day,a당	1.00	0.29	0.71
굴착복구(B-Type)	a	야간(10㎡초과~20㎡이하), 45㎡/day,a당	2.00	4.88	2.88
굴착복구(B-Type)	a	야간(20㎡초과~30㎡이하), 49.05㎡/day,a당	5.00	13.35	8.35
굴착복구(B-Type)	a	야간(30㎡초과), 53.01㎡/day,a당	112.00	208.14	96.14
굴착복구(A-Type)	a	야간(48㎡초과), 129.8㎡/day,a당	2.00	0.93	1.07
표층확폭복구(B-Type)	a	야간,t=5cm 15㎡이하, 110.6㎡/day,a당	2.00	-	2.00
표층확폭복구(B-Type)	a	야간,t=5cm 15㎡초과~ 30㎡이하,124.6㎡/day,a당	5.00	-	5.00
표층확폭복구(B-Type)	a	야간,t=5cm 30㎡초과~ 60㎡이하,140㎡/day,a당	5.00	2.39	2.61
표층확폭복구(B-Type)	a	야간,t=5cm 60㎡초과, 176.4㎡/day,a당	20.00	16.41	3.59
절삭 후 덧씌우기 (A-Type)	a	야간,t=5cm,50a기준,a당	50.00	-	50.00
절삭 후 덧씌우기 (B-Type)	a	주간,t=5cm,34a기준,a당	-	7.44	7.44
절삭 후 덧씌우기 (B-Type)	a	야간,t=5cm,34a기준,a당	150.00	434.02	284.02
절삭 후 덧씌우기 (C-Type)	a	야간,t=5cm,18a기준,a당	150.00	68.96	81.04
그루빙	a	종절단 9*51*4,㎡당	100	470	370
쏠라표지병	개	125*40mm	-	92	92

❍ 관급자재 변경내역

품명	규격	단위	수량		증·감
			당초	변경
아스콘(순환)	BB-2(기층용)	톤	9,800	11,526	1,726
아스콘(순환)	WC-2(표층용)	톤	1,400	208	1,192
아스콘(순환)	WC-4(표층용)	톤	7,041	953	6,088
아스콘(1등급)	WC-3, t=20mm	톤	4,000	5,179	1,179
고내구성 아스콘	SMA(PG64-22)	톤	1,000	-	1,000
	개질SMA(PG76-22)	톤	1,000	-	1,000
미끄럼방지포장재	t=3mm	㎡	3,000	590	2,410

❍ 폐기물 변경내역

공 종	규격	단위	수량		증·감
			당초	변경
운반 및 처리	폐아스콘	톤	8,133	6,219	1,914

		책임건설사업관리 기술자 검토의견

❍ 실정보고 내용대로 수량산출 및 공사비 반영이 적정하다고 판단됨

		조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 물량 증.감 사항에 대하여 낙찰차액(금282백만원)을 포함한 예산(5,322백만원) 범위내에서 설계변경(정산) 시행하고 변경계약 체결 후 준공처리코자 함.

붙임  1. 설계변경 요청(감리단) 1부

2. 설계변경내역서(정산) 1부.

3. 제비율 검증표 1부.  끝.