문서번호	도로보수과-11218
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이상구		김순수	12/15 고영준
협조

『2021년 교통안전시설(노면표시)   유지보수공사(연간단가)-북부』

정산 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

『2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』

설계변경 (정산) 검토 보고

우리사업소에서 시행하는『2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-북부』와 관련하여 시공물량 증·감에 따른 설계변경(2회, 정산) 검토 결과 보고임.

		관련근거

❍ 서우제 2021-339호(2021.12.14.) : 2차 설계변경서 제출

		공사개요

❍ 공 사 명 : 2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-북부

❍ 공사기간 : 2021.04.02.~2021.12.31

❍ 공사규모 : 차선도색 177,160m, 차선제거 8,150m.

❍ 공 사 비 : 666,828천원(도급비 543,621, 관급비 123,207)

❍ 시 공 사 : ㈜지아이엘건설  대표 김용이

❍ 건설사업관리용역 : ㈜서우티이씨

		보고내용

❍ 노면표시 공종별 시공물량 증·감에 따른 변경

❍ 기타 경미한 변경

		주요 변경내용

❍ 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분	공 사 금 액			비고
	당 초	변 경	증·감
총공사비	666,828,640	683,106,840	증)16,278,200
도 급 비	543,621,840	542,400,000	감) 1,221,840
관 급 비	123,206,800	140,706,840	증)17,500,040

❍ 주요공종 변경내역

공 종	규격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
백색실선	수동식	m	6,000	1,978	감)4,022
백색파선	수동식	m	6,000	2,913	감)3,087
황색실선	수동식	m	5,000	4,559	감) 441
황색파선	수동식	m	5,000	232	감)4,768
청색실선	수동식	m	500	417	감) 83
청색파선	수동식	m	500	351	감) 149
분홍색실선	수동식	m	500	917	증) 417
백색문자기호	수동식	m	10,000	8,045	감)1,955
백색횡단보도	수동식	m	8,000	2,077	감)5,923
차로 밑그림	백색실선	m	7,000	3,312	감)3,688
차로 밑그림	백색파선	m	6,500	3,264	감)3,236
차로 밑그림	황색실선	m	5,000	4,559	감) 441
차로 밑그림	황색파선	m	5,000	232	감)4,768
차로 밑그림	문자.기호	m	10,000	8,045	감)1,955
차로 밑그림	횡단보도	m	8,000	2,077	감)5,923
백색실선	재도색	m	15,000	17,890	증)2,890
백색파선	재도색	m	20,000	16,004	감)3,996
황색실선	재도색	m	23,000	25,746	증)2,746
황색파선	재도색	m	12,000	6,796	감)5,204
청색실선	재도색	m	5,000	3,478	감)1,522
청색파선	재도색	m	3,000	984	감)2,016
분홍색실선	재도색	m	660	-	감) 660
백색문자기호	재도색	m	25,000	23,372	감)1,628
백색횡단보도	재도색	m	32,000	33,834	증)1,834
백색문자기호(야간)	재도색	m	-	7,496	증)7,496
백색횡단보도(야간)	재도색	m	-	8,327	증)8,327
차선제거	건식흡입	m	6,650	15,429	증)8,779
차선제거(야간)	건식흡입	m	1,500	-	감)1,500
교통신호수	주간	인	345	176	감) 169
교통신호수	야간	인	-	20	증) 20

❍ 관급자재 변경내역

공 종	규격	단위	수 량		증·감	비고
			당초	변경
노면표지페인트	융착식(흰색)	포	3,358	3,974	증) 616
	융착식(노란색)	포	1,115	1,158	증) 43

		감리원 검토의견

❍ 본 공사에 대한 계약물량과 현장 실작업 물량의 차이를 반영하여 이를 확인한 바 설계변경이 타당하다고 사료됨.

		조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 물량 증·감 사항에 대하여는 설계변경(정산) 시행하고 변경계약 체결후 준공처리코자 하며

❍ 관급자재 변경에 따른 부족예산(금17,500,040원)은 교통운영과에서 재배정된 “교통사고 잦은 곳 개선 사업(노면표시)” 예산을 사용코자 함.

(예산과목 : 도시교통 체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고 잦은 곳 개선, 시설비 및 부대비, 시설비)

붙임 1. 정산보고서(감리) 1부

2. 설계변경(정산) 내역서 1부.  끝.