문서번호	도로보수과-11881
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
정의현		이이용	12/15 윤옥광
협 조

『통일로 중앙버스정류장 보도 턱낮춤 공사』

설계변경(2회, 정산) 검토 보고

2021. 12.

서부도로사업소

(도로보수과)

『통일로 중앙버스정류장 보도 턱낮춤 공사』

설계변경(2회, 정산) 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 통일로 중앙버스정류장 보도 턱낮춤 공사와 관련,시공사로부터 현장 실측에 따른 실정 보고가 제출되어, 그에 따른 검토 결과 적정하다고 사료되어 실정 보고를 반영하여 설계변경을 실시하고자 함.

□ 추진근거

○ 통일로 중앙버스정류장 보도 턱낮춤 공사 실정보고 제출의 건

- 영길-2021-1215(’21.12.15.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 통일로 중앙버스정류장 보도 턱낮춤 공사

○ 공사기간 : 2021.07.05. ~ 12.31.

○ 시 공 사 : ************

○ 총공사비 : ***********

- **************************************

○ 사업위치 : 통일로 중앙버스정류장 26개소

연번	노선명	버스정류장명	개소			비고
			상행	하행	합계
1	통일로	은평뉴타운 10단지	1	1	2
2		구파발역입구	1	1	2
3		박석고개, 신도고등학교	1	1	2
4		세명컴퓨터 고등학교	2	2	4
5		연신내역, 연서시장	1	1	2
6		동명여고, 천주교 불광동성당	1	1	2
7		불광역 3ㆍ6호선	1	1	2
8		불광역 3호선, 서울혁신파코	1	1	2
9		한전성서지사, 북한산푸르지오	1	1	2
10		녹번역	1	1	2
11		산골고개	1	1	2
12		홍제역	1	1	2
합계			13	13	26

□ 설계변경

○ 설계변경 사유

- 市-교통운영과에서 설계한 내역과 시공시 현장 실측한 내역이 상이하여 시공사에서 실정보고를 제출하였으며, 검토 결과 이상이 없어 아래와 같이 설계변경에 반영

① 신규공정 추가 : 아스콘 절삭 및 바브켓(야간), 싸인보드카

⇒ 경계석 재설치 후 아스콘 띠 포장시 필요한 아스콘 절삭 공정 및 야간공사시 교통 통제를 위한 싸인보드카 공정이 제외되어 있어 반영 조치

② 보도블록포장 재설치 물량을 보도블록 포장(신규)로 변경

⇒ 현장 실측 결과, 기존의 보도블록이 노후화되어 재사용하기가 어려워 재설치를 지양하고 신규 설치로 변경

③ 구조물 터파기 물량 증가

⇒ 당초 설계 토공량 산정은 18cm(모래 3cm, 혼합골재 15cm)이나 시공시 기존 경계석의 턱낮춤(t=20cm) 시공으로 터파기 물량 증가

④ 백색 실선 차선도색 물량 증가

⇒ 현장 실측 결과, 공사시 삭선되는 백색 실선물량이 설계서 수량과 상이하여 현장 실 측정물량 반영 조치

⑤ 기타 경미한 변경사항은 공정 현장 실측한 결과에 따라 반영 조치

⑥ 제경비율 정산 : 보험료, 산업안전보건관리비, 환경보존비, 퇴직공제부금비 등 정산

⇒ 그에 따라, 신규공정 추가 및 기타 공정 물량이 증가하여 계약금액대비 보도 턱낮춤 구간 26개소에서 22개소로 축소

연번	노선명	버스정류장명	개소			비고
			상행	하행	합계
1	통일로	은평뉴타운 10단지	1	1	2	변경
2		구파발역입구	1	1	2
3		박석고개, 신도고등학교	1	1	2
4		세명컴퓨터 고등학교	2	2	4
5		연신내역, 연서시장	1	1	2
6		동명여고, 천주교 불광동성당	1	1	2
7		불광역 3ㆍ6호선	1	1	2
8		불광역 3호선, 서울혁신파코	1	1	2
9		한전성서지사, 북한산푸르지오	1	1	2
10		녹번역	1	1	2
11		산골고개	1	1	2	제외
12		홍제역	1	1	2
합계			11	11	22

○ 설계변경 내역

- 설계변경 금액

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증ㆍ감(원)	비 고
총 공 사 비	***********	***********	************	-
도 급 비	***********	***********	************	-
관 급 비	**********	**********	************	-
이 전 비	*********	**********	***********	-

- 관급자재 수량 및 금액 변경 내역

품명	당 초			변 경			증ㆍ감
규격	수량	단가 (원)	소계 (원)	수량 (톤)	단가 (원)	소계 (원)	수량
아스팔트콘크리트	**	******	*********	**	******	*********	*
WC-2, 3 표층용
콘크리트가공블록(투수)	***	******	*********	***	******	**********	******
T60
고강도점자블럭 (선형)	***	*****	*******	***	*****	*********	*****
300*300*30, (황색)
고강도점자블럭 (점형)	*****	*****	*********	*****	*****	**********	*****
300*300*30, (황색)
보차도경계석 (미끄럼방지)	*	*	*	**	******	*******	****
200*250*1000(직선, 차상도)
보차도경계석 (미끄럼방지)	**	******	*********	*	*	*	****
200*250*1000(곡선, 차상도)
보차도경계석 (미끄럼방지)	**	******	*******	**	******	*******	*
200*250*1000(직선경사)
보차도경계석 (미끄럼방지)	***	******	*********	***	******	*********	****
200*100*1000(직선)
보차도경계석 (미끄럼방지)	***	*****	*********	***	*****	*********	****
미끄럼방지 가공 (너비 200mm)
소계	***********			***********
수수료	********			********
합계	***********			***********

- 폐기물 변경 내역

‣ 폐기물 처리 물량 변경

공 정 명	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
폐아스콘 운반	㎥	71.30	108.00	증 36.7
폐아스콘 운반	㎥	20.00	51.00	증 31.0
폐콘크리트 처리	ton	164.60	249.00	증 84.4
폐아스콘 처리	ton	47.10	121.00	증 73.9

‣ 폐기물 처리 금액 변경

(단위 : 원)

공 사 명	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총 용 역 비	*********	**********	***********
도 급 비	*********	**********	***********

□ 조치계획

○ 상기 보고내용을 반영하여 변경내역서(붙임 2)와 같이 설계변경을 시행하고자 함

붙임 1. 실정보고 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.