문서번호	교통운영과-17833
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
교통전문관		BRT팀장	교통운영과장
이나은		장길홍	12/15 강진동
협조	주무관		류근호
	교통전문관		조혜진

- 2021년 중앙버스전용차로 흐름개선 -
기본 및 실시설계 용역 설계변경(정산) 보고(변경)

2021. 12.

도시교통실

(교통운영과)

- 2021년 중앙버스전용차로 흐름개선 -

기본 및 실시설계 용역 설계변경(정산) 보고(변경)

2021년 중앙버스전용차로 흐름개선 기본 및 실시설계 용역의 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2021년 중앙버스전용차로 흐름개선 기본 및 실시설계

○ 계약기간 : 2021. 3. 10. ~ 2021. 12. 31.

○ 과업규모 : 기본설계 11개소, 실시설계 14개소

○ 계약금액 : ************

○ 용 역 사 : ******************

□ 설계변경 내역

○ 교통안전시설 심의, 자치구·경찰서 등 유관기관 협의, 민원 발생 등에 따른 설계 지점 및 물량 변경

- 당초 : 현장조사 11개소, 기본설계 11개소, 실시설계 14개소

- 변경 : 현장조사 6개소, 기본설계 6개소, 실시설계 4개소

연번	노선명	대상지점	과 업 내 용	설계내용
				당초	변경
*	***	*********	***********	*********	****
*	***	*******	*****	*********	*
*	***	*********	******	*********	****
*	****	*********	*****	*********	*
*	***	********	*******	*********	****
*	***	**************	*****	*********	*
*	****	*****	*****	*********	*
*	****	*****	*******	*********	*
*	****	*************	******	*********	*
**	****	*********	*****	*********	*

연번	노선명	대상지점	과 업 내 용	설계내용
				당초	변경
**	****	********	*******	*********	*
**	****	*****	*****	****	****
**	****	*****	*****	****	*
**	****	******	*****	****	*
**	***	*************	*********	*	*********
**	****	*************	*******	*	****
**	****	****	*******	*	****
**	****	**********	*****	*	****
**	*****	************	*******	*	****

○ 총용역비 변경 : ********************************

****	****		****
	****	****
****	***********	**********	************
*****	**********	*********	***********
****	***********	**********	************

□ 검토의견 및 조치계획

○ 과업지점의 변경으로 인해 위와 같이 설계변경하여 정산(준공)처리 하고자 함

- 예산과목 : 도시교통실 교통운영과, 도시교통 체계 및 소통 개선, 버스서비스이용제고(교통관리계정), 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비(401-01)

붙임  1. 설계 변경 내역서 1부.
2. 합의서 1부.  끝.