문서번호	토목부-23528
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
김성렬	한병찬	12/15 임춘근

건설사업관리 용역 재개 및 준공기한 연기 검토 보고

≪탄천·한강변 정비 및 보행교 기본 및 실시설계 건설사업관리(설계감리) 용역≫

2021. 12.

도시기반시설본부

(토  목  부)

건설사업관리용역 재개 및 준공기한 연기 검토 보고

≪탄천·한강변 정비 및 보행교 기본 및 실시설계 건설사업관리(설계감리) 용역≫

중지된 설계용역 과업 재개에 따른 건설사업관리용역(설계감리) 재개 및 준공기한 연기 검토 보고임.

□ 관련규정

○ 건설기술진흥법 시행령 제57조(건설사업관리 대상 설계용역)

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제10조(발주청, 건설사업관리기술인, 시공자, 설계자의 기본임무)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계

건설사업관리(설계감리)용역

○ 위    치 : 탄천 삼성교 ~ 한강 합류부 일대

○ 용역규모 : 하천정비(국제교류복합지구 주변 탄천·한강 합수부 일대 63만㎡), 탄천보행교 신설(폭 15m, 연장 280m)

○ 계약기간 : ****************************

○ 계약금액 : *********

○ 설 계 사 : *********

□ 추진경과

○’20.02.     : 탄천,한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계 시행

○’20.06.05. : 설계 감리용역 의뢰(동남권사업과⇒도기본)

○’20.10.27. : 설계 감리용역 계약

○’21.01.     : 기본설계 VE시행 (동남권사업과)

○’21.08.05.  : 설계용역 중지통보 (동남권사업과⇒도기본)

○‘21.08.06.  : 설계용역 중지통보 (도기본⇒계약자)

○‘21.12.06.  : 설계용역 재개통보 (동남권사업과⇒도기본)

□ 검토사항

○ 준공기한 연기

- 계약기간

당 초	변 경
’20. 10. 27. ~ ’22. 3.31.	’20. 10. 27. ~ ’22. 8. 12.

- 귀책소재 : 서울특별시

- 지체상금 : 미부과

- 연기사유

▷ ‘탄천·한강변 정비 및 탄천 보행교 신설 기본 및 실시설계용역’ 계약기간 연장에 따른 감리용역 계약기간 연장 필요.

○ 감리용역 재개

-  동남권사업과-3630(2021.12.6.)에 따라 설계감리용역 재개 필요

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사유로 우리 부에서 진행 중인 건설사업관리(설계감리) 용역 재개 및 준공기한을 연기하여 사업시행에 차질이 없도록 조치코자 함.

붙 임  1) 관련공문 1부.

2) 합의각서 1부.  끝.