코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	주거환경과장
(경유)
제목	모아주택 시범사업 및 제도화 용역 계약변경 지출품의 결재 요청

1. 전략사업과-4247(2021.12.13.)와 관련입니다.

2. 모아주택 시범사업 및 제도화 용역 계약변경 의뢰에 따라 지출품의 결재 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명: 모아주택 시범사업 및 제도화 용역

나. 변경내용

구 분	당 초	변 경	비고
과업내용	****************************************** *********	************************* ************************** *****************	과업추가 및 변경
과업기간	계약일로부터 7개월 (‘21.6.18.~’22.1.18.)	계약일로부터 13개월 (‘21.6.18.~’22.7.18.)	기간연장
계약금액	140,523,900원	340,230,000원 (증 199,706,100원)	증액

다. 예산과목: 주택정책실 전략사업과, 평생 살고 싶은 마을만들기 추진, 주거지 재생사업 추진, 관리형 주거환경개선사업 계획 수립, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 균형발전본부 주거환경과)

붙임 1. 설계변경 보고 방침 1부.

2. 계약의뢰 관련 공문 1부.  끝.

							전략사업과장
주무관							유성완			모아주택팀장					김지호					전략사업과장					12/15 김장수
협조자
시행			전략사업과-4346									(						)		접수											(						)
우	04514					서울특별시 중구 서소문로 124 서소문2청사															/
전화		02-2133-8235						/전송								/	ryu0019@seoul.go.kr												/	부분공개(5)