투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	용역 설계변경(전체1회, 1차 1회) 계약 의뢰(연결교량 건설사업관리용역)

우리 부에서 시행 중인 『창동상계 동서간 연결교량 감독권한대행 등 건설사업관리용역』과 관련하여 아래와 같이 설계 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 창동상계 동서간 연결교량 감독권한대행 등 건설사업관리용역

나. 용 역 비 : 2,567백만원(1차 612백만원)

다. 용역기간 : ‘21.04.19.∼‘24.05.17.(1차 ’21.04.19.~‘22.04.18.)

라. 도 급 자 : ㈜동해종합기술공사 외 2개사

마. 예산과목

- 동북권사업과, 도시개발특별회계, 도시경제기반형 활성화추진계획, 도시재생 계획수립, 창동상계 동서간 연결교량 건설사업, 시설비및시설부대비, 감리비

- 교통운영과, 교통개선분담금계정, 도시교통 체계 및 소통 개선, 교통체계 및 도로소통 개선, 헌릉로 중앙버스전용차로 조성, 시설비및부대비, 감리비

바. 설계변경 현황                                           (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	비 고
** ****	**	************ ***********	***********************	*
	**	***********	***********	************
** ****	**	***********************	***********************	*****
	**	*********	*********	**********

사. 설계변경 사유

- 헌릉로 중앙버스전용차로 설치공사 통합 감리 시행 반영

- 현장여건에 따른 분야별 건설사업관리기술자(안전 등) 투입 일정 변경

- 차수 계약기간 오류 정정

붙 임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 건설사업관리기술자 검토보고서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	권해엽		교량건설과장	장종환		토목부장	12/15 임춘근
협조자
시행	토목부-23454	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)