“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1회-최종)시행(2021년 강남구 관내송·배급수관 정비공사 건설폐기물 처리용역)

우리사업소에서 시행중인『2021년 강남구 관내송·배급수관 정비공사 건설폐기물 처리용역』에 대하여 설계변경(1회-최종)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2021년 강남구 관내송·배급수관 정비공사 건설폐기물 처리용역

나. 도 급 자 : **********************************

다. 용역기간 : 2021.05.24. ~ 2021.12.31.

라. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증, 감
계약 금액	총 용역비	100,343,300*	156,596,000*	증************
	공급가액	***********	************	*************
	부가가치세	9,122,118*	************	************

마. 변경사유 : 계약물량 증ㆍ감에 따른 설계변경

바. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비, 노후 상수도관(송배수관)정비(사업코드 : 41101)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비, 장기사용 송배수관 정비(사업코드 : 22107)

붙임  설계변경 관련서류 각 1부.  끝.

주무관	권혜진		주무관	한혜연		급수관리팀장	전동근		강남수도사업소장	12/15 박창석
협조자	주무관	차승현		급수운영과장	최춘근
시행	급수운영과-18306	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4864	/전송	02-3146-4889	/		/	부분공개(5)