“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1회) 및 차수별 계약금액 변경시행[2021년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)]

우리사업소에서 시행중인『2021년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)』에  대하여 설계변경(1회) 사전심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경 및 차수별 계약금액   변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)

나. 도 급 자 : ************

다. 공사기간 : 2021.06.25. ~ 2022. 6. 30.

라. 변경사유 : 신규공종  및 계약물량 증·감 발생

마. 설계변경(1회) 및 차수별 계약금액 변경내용

단위: 원

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	***********	***********	*
1차수	***********	***********	************
2차수	***********	***********	************

바. 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,급.배수공사비,신설공사비(급수공사)

- 상수도사업비용, 영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비 (맨홀식

수도계량기 보호통 보온재 등 정비)

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비 (대형 상수도관 세척)

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비 (불용관 정비)

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(장기사용 배급수관 정비)

- 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비(아리수통합정보센터 시스템 고도화)

- 소방용수시설등의설치 및 관리, 소방용수시설등의설치 및 보수, 시설비

첨부  1. 설계변경 심의 결과 보고서 및 심의의결서 각 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증 확인서 각1부.

4. 설계변경 합의서 1부.  끝.

주무관	정영섭		시설관리팀장	이승영		시설관리과장	고신석		남부수도사업소장	12/15 박병성
협조자	주무관	김완기		주무관	김윤환		주무관	정선이
시행	시설관리과-24305	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4595	/전송	02-3146-4639	/	razni@seoul.go.kr	/	부분공개(5)