“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	2021년 폐입상활성탄 준설 및 투입공사 설계변경(제1회) 계약의뢰

1. 우리센터에서 시행중인 『2021년 폐입상활성탄 준설 및 투입공사 』에 대하여

아래와 같이 설계변경 계약의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 폐입상활성탄 준설 및 투입공사(장기계속공사)

나. 공사개요 : 활성탄 준설 및 포설 2,688㎥[8지]

- 1차 : 1,344㎥[1~4지]      - 2차 : 1,344㎥[5~8지]

다. 계약금액 : 345,623,890원

- 1차 : 174,719,810원     - 2차 : 170,904,080원

라. 공사기간 : 2021.11.1. ~ 2022.4.30 (1차수 : 2021.12.31.)

마. 계 약 지 : ㈜ 서원개발  대표자  김현지

바. 설계변경(제1회)                                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 차	345,623,890	331,900,000	△13,723,890
1 차	174,719,810	158,300,000	△16,419,810
2 차	170,904,080	173,600,000	2,695,920

사. 설계변경 사유 : 차수별 계약 물량 조정 및 보험료 정산 등

아. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 재료비(일반재료비)

붙임  1. 2021년 폐입상활성탄 준설 및 투입공사 설계변경(제1회)

2. 설계변경 심의위원회 심의결과 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 변경 동의서 및 보험료 납부확인서, 계약금액조정 검증확인서 각 1부. 끝.

	정수시설과장
주무관	김영후		정수시설과장	12/15 유통희
협조자	주무관	장현순
시행	정수시설과-6904	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02)3146-5577	/전송	02)3146-5508	/	kyhoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)