문서번호	시설과-11492
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
박건수		이승우	12/15 강호광
협 조
	시설관리팀장			임춘길
	주무관			노병권
	주무관			강은영
	주무관			정재윤

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

『중부,서부지역 상수도공사(급수,누수복구,시설물) 건설사업관리용역』

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

2021. 12.

상수도사업본부

(시설과)

『중부,서부지역 상수도공사(급수,누수복구,시설물) 건설사업관리용역』

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

우리본부에서 추진중인 「중부,서부지역 상수도공사(급수,누수복구,시설물) 건설사업관리용역」 의 설계변경 심의위원회 개최결과를 보고드림.

□ 용역현황

❍ 용 역 명 : 중부,서부지역 상수도공사(급수,누수복구,시설물) 건설사업관리용역

❍ 용역기간 : 2021.6.22. ~ 2021.12.31.(1차)

(총차 : 2021.6.22. ~ 2023.6.21.)

❍ 계약금액 : ********************

********************

❍ 계약상대자 : ********************

❍ 용역개요

- 급수공사 분야(급수공사,간선배관,보호통교체,포장 등) : 10,418건

- 누수복구 분야(누수복구,불용관,동결관 정비 등) : 12,320건

- 시설물 분야(노후밸브,시설물보수,관세척을위한맨홀설치 등) : 3,624건

□ 설계변경 심의위원회 개최

❍ 일   시 : 2021. 12. 14.(화) 14:00

❍ 장   소 : 비대면 심의(코로나19 확산 방지)

❍ 위원회 구성

**********************

***********************************

❍ 심의안건 : 설계변경 적정성 심의(1차 최종)

□ 설계변경 현황

❍ 설계변경 사유 : 기술인 근무일수 증․감에 따른 조정

공 종	규격	수 량
		당 초	변 경	증 감
특급기술인 - 평일	인.월	*****	*****	*******
중급기술인 - 평일	인.월	******	******	*******
초급기술인 - 평일	인.월	******	******	*******
중급기술인 – 휴일 및 야간	인.일	*******	*******	*******
초급기술인 - 휴일 및 야간	인.일	*******	*******	*******

※ 1차분 근무일수 증․감 조정에 따른 물량은 3차분으로 증․감 조정

❍ 차수별 계약금액 조정내역

구 분	당 초	변 경	증 감
총 차	*************	*************	*
1차(금회)	*************	*************	***********
2차	*************	*************	*
3차	*************	*************	***********

□ 심의결과 : 원안 가결(적정)

위 검토자 : 설계변경 심의위원회

*******************************

***************************

***************************

***************************

************************

□ 향후계획

❍ 설계변경 심의위원회 개최 결과 적정하여 원안대로 설계변경 시행

붙  임: 변경설계서 1부.  끝.