문서번호	시설관리과-29192
결재일자	2021. 12. 15.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
★주무관	시설운영팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
임상근	이유찬	김상웅		12/15 김정애
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

설계변경 및 계약금액 조정시행 보고

(지봉로 장기사용 송배수관 정비공사)

2021. 12.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

설계변경 및 계약금액 조정시행 보고

(지봉로 장기사용 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행 중인「지봉로 장기사용 송배수관 정비공사」와 관련하여 시공물량 증감 및 신규공종 발생 등으로 설계변경 및 계약금액 조정이 요구됨에 따라 우리 본부에 설계변경 심의를 요청하여 예산집행에 만전을 기하고자 함.

※ 공사감독2처-17609(2021. 12. 4.)호

Ⅰ		관련규정

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

❍ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정자치부 예규 제67호(2016. 10. 4.)

- 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

Ⅱ		공사개요

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 지봉로 장기사용 송배수관 정비공사

❍ 공사위치 : *********************

❍ 공사개요 : D= 300~700mm, L= 394m

❍ 공사기간 : 2021. 5. 10. ~ 2021. 12. 19.

❍ 시 공 사 : ******************

❍ 감 독 청 : ********************************

Ⅲ		보고내용

□ 설계변경 사유

1. 공사현장 상황과 설계서 상이

연 번	구 분	주요 변경내용	관련근거
1	현장실정 검토보고	※ 사토장 위치 및 중간집하장 운반거리 변경 중간집하장 운반거리 변경 (3km → 12.9km) 사토장 변경(43.1km → 48.8km) 계약단가 적용	시설관리과-25892 (2021. 11. 8.)
2	현장실정 검토보고	※ 횡단굴착 수량 증가 지장물 확인을 위한 횡단굴착 수량 증가	시설관리과-27277 (2021. 11. 23.)
3	현장실정 검토보고	※ 기존관 장애물로 인한 철거 불가로 1구간 기존관(D900) 폐쇄	시설관리과-26881 (2021. 11. 18.)
4	현장실정 검토보고	※ 기존관(D900) 철거에 따른 굴착 단면 변경	시설관리과-27141 (2021. 11. 22.)
5	현장실정 검토보고	※ 2구간 하수박스 하월에 따른 토공량 증가	시설관리과-27684 (2021. 11. 26.)
6	현장실정 검토보고	※ 교통정리원 설계 누락으로 인한 반영	시설관리과-27684 (2021. 11. 26.)

2. 발주처 추가 작업지시

연 번	구 분	주요 변경내용	관련근거
1	3구간 시공계획 변경	※ 라인스토핑(D800) 및 D800/700 부단수 분기 추가	시설관리과-0337 (2021. 8. 27.)

3. 제경비 등 실 사용 정산에 의한 변경

□ 변경 내용

공 종	규 격	단 위	당 초	변 경	증 ․ 감
관부설	D= 300 ~ 800mm	m	397	283	감) 114
원형밸브실	D= 200 ~ 700mm	개	10	14	증) 4
구형밸브실	D= 400 ~ 900mm	개	6	2	감) 4
무단수차단	D= 800mm	개	-	1	증) 1

□ 계약금액 변경(조정) 내역                            (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	공급가액	581,457,273	661,000,000	증) 79,542,727
	부가가치세	58,145,727	66,100,000	증) 7,954,273
	계	639,603,000	727,100,000	증) 87,497,000

Ⅳ		조치의견

❍ 보고 내용과 같이 설계 변경으로 도급비가 증액되어 계약금액이 조정됨에 따라 상수도사업본부 안전조사과에 계약금액 조정검토를 의뢰한 후 변경 계약을 시행하고자 합니다.

붙임  1. 공단 실정보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 및 수량산출서 등 각 1부.  끝.