문서번호	교량안전과-19067
결재일자	2021. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
박상홍		박찬규	12/16 조현석
협조

- 한강교량보수보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리 - 설계변경[전체(2회), 2차(1회)] 검토 보고

2021. 12.

안전총괄실

(교량안전과)

- 한강교량보수보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리 -

설계변경[전체(2회), 2차(1회)] 검토 보고

감독권한 대행 등 건설사업관리 용역(장기계속)과 관련 원활한 감리업무 수행을 위해 공사 추진일정을 고려한 감리원 실 투입기간 조정 및 안전관리 전담 감리원 신규 투입에 따른 설계변경 검토 보고 임.

※ 건설사업관리용역 변경 설계서[전체(2회), 2차(1회)] 제출

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 한강교량보수·보강공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 계약기간 : ’20.01.06.∼’22.12.31.(2차 : ’21.01.06.∼’21.12.31.)

○ 계약금액 : 2,629,600천원 (2차 : 900,000천원)

○ 용 역 사 : (주)동명기술공단, (주)천일, (주)경동엔지니어링

□ 설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 원활한 감리업무 수행을 위해 공사 추진일정을 고려한 감리원 실 투입 기간 조정 및 안전관리 전담 감리원 신규 투입 반영

○ 2021년 기술자 투입인원 조정현황

구 분		등급	2021년(당초)														2021년(변경)																비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	개월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		개월
토목	책임기술인 (총괄)	특급 P Q			(3/2 투입, 김현태)											10.0			(3/2 투입, 김환부)													10.0
	분야별 (토목,고급1)	고급 P Q			(3/15 투입, 박상길)											9.5			(3/15 투입, 박상길)													9.5
	분야별 (토목,고급1)	고급 P Q			(3/15 투입, 기병문)											9.5			(3/15 투입, 기병문)													9.5
	분야별 (토목,중급1)	중급					(투입종료)									9.5	(1/1 투입, 정용희)															9.5
										(변경투입)
	분야별 (토목,초급1)	초급			(3/2 투입, 황수명)											9.5			(3/2 투입, 박린규)					(9/1 무대투입, 이상화)								9.5
																								무대기간(9/1~11/15)
	분야별 (토목,초급2)	초급			(3/2 투입, 손동화)											8.5		(2/1 투입, 손동화)						(10/16 무대투입, 손동화)								8.5
																								무대기간(10/16~12/31)
도장	분야별 (도장,중급2)	중급			(3/2 투입, 조종찬)											8.0			(3/2 투입, 조종찬)													8.0
																								무대기간(11/1~12/24)
계			64.5개월														64.5개월

- 조정현황 : 공사일정에 따른 일부 감리원 실 투입 기간 조정(무대투입 미산입)

○ 건설사업기술인 투입계획표[전체(2회) 변경]

구 분		2020년												2021년												2022년												비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
책임기술인 (총괄, 특급)	당초	1/6투입(김현태)												동절기 철수																								33.90 개월
	변경	1/6투입(김현태)												동절기 철수		3/2투입(김환부)										동절기 철수		3/2투입(김환부)										31.90 개월
분야별 (토목,고급1)	당초			3/16투입(박상길)												3월말투입																						27.07 개월
	변경			3/16투입(박상길)												3/15투입(박상길)												3/2투입(박상길)										29.04 개월
분야별 (토목,고급2)	당초				4/16투입(이영재)											3월말투입																						26.03 개월
								7/1변경투입(기병문)
	변경				4/16투입(이영재)											3/15투입(기병문)												3/2투입(기병문)										28.00 개월
								7/1변경투입(기병문)
분야별 (토목,중급1)	당초	1/6투입(정용희)																투입종료(19.9개월)																				35.90 개월
																						변경투입												투입종료(16개월)
	변경	1/6투입(정용희)																																				35.90 개월
분야별 (토목,초급1)	당초					5/25투입(황수명)																																15.22 개월
	변경					5/25투입(황수명)										3/2투입(박린규)						9/1투입(이상화)						3/2투입(미정)										23.22 개월
																						무		대
																						무대(9/1~11/15)
분야별 (도장,중급2)	당초				4/28투입(김인화)																																	23.85 개월
						5/25 변경투입(박승찬) 7/01 변경투입(김창호) 11/16 변경투입(조종찬)
	변경				4/28투입(김인화)											3/2투입(조종찬)											2/15투입(조종찬)											25.85 개월
																								무	대
						5/25 변경투입(박승찬) 7/01 변경투입(김창호) 11/16 변경투입(조종찬)																	무대 (11/1~12/24)												12/15 투입종료
분야별 (토목,초급2)	당초							7/6투입(손동화)																														17.63 개월
	변경							7/6투입(손동화)							2/1투입(손동화)													3/2투입(손동화)										24.40 개월
																								무	대
																						무대(10/16~12/31)
분야별 (안전,초급3)	당초																																					-
	변경																											3/2투입(미정)										9.00 개월

- 조정현황 : 시공초기에 감리원 투입 및 안전관리 전담인력 배치에 따른 신규 투입(기술심사담당관-9537호,2021.6.17.)

○ 용역비 증·감 현황                                       (단위:천원)

구 분		상주기술자	제경비	용역금액	증・감	비 고
전체분 (2회)	당 초	190.0인·월	59.45%	2,629,600	증)156,900
	변 경	207.0인·월	59.45%	2,786,500
2차분 (1회)	당 초	65.8인·월	59.45%	900,000	-
	변 경	65.8인·월	59.45%	900,000

- 조정현황 : 안전관리 전담감리원 신규 투입(‘22년)에 따른 전체분 증액(156,900천원)되나 2차분은 계약금액 변동 없음.

○ 계약기간 변동 현황

구 분		용역기간	용 역 비(천원)	비 고
전체(2회)	당초	2020.1.6.∼2022.12.31.	2,629,600	변경없음
	변경	2020.1.6.∼2022.12.31.	2,786,500
2차(1회)	당초	2021.1.1.∼2021.12.31.	900,000	변경없음
	변경	2021.1.1.∼2021.12.31.	900,000

□ 검토의견 및 조치계획

○ 본 건은 장기계속(3년: ’20.16~‘22.12.31) 사업으로 추진중인 한강교량 보수·보강공사 감독권한 대행 및 건설사업관리를 위해 추진하는 용역으로서

○ ‘22년 안전관리 전담인력 신규배치(1명)에 따른 전체분은 증액(156,900천원) 되나, 금년도(2차분)는 효율적인 현장관리 및 공사 마무리를 위해 도급액 및 용역기간 변경 없이 배치계획 및 실 투입 기간 등을 반영하기 위해 설계변경을 시행 하고자 함.

붙임 : 1. 변경 내역서[전체(2회), 2차(1회)] 1부.  끝.