투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(난지물재생센터 3차(총인) 기계설비공사 선금 신청 재검토 지시)

1.업무지시현장 : 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사 주식회사 삼안

2.작 성 일 자 : 2021-12-16 10:12:05

3.지 시 내 용

가. 난지총인 제2021-295호(2021. 12. 15.), 「기계설비공사 2차 계약분 선금 신청의 건 검토 보고」 관련입니다.

나. 재검토 지시 사항

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제6장 선금·대가 지급요령 제2절 “3-라-1)-라)에 따르면 ‘계약체결 후 이월이 예상되는 경우 해당연도 이행금액을 기준으로  선금지급해야 한다.’라고 규정되어있습니다.

- 선금신청(2021. 12. 15.) 기준으로 현재 신청한 선금은 해당연도 내 집행할 수 없을 것으로 보여 선금신청 대상이 아닌 것으로 판단됩니다. 단, 2021년 하반기 지방재정 신속집행 적극 활용 지침(지방계약 집행 특례)에 따라 예외 사항으로 인정 될 수 있는 사항으로 판단되오니, 해당 지방계약 집행 특례를 참고하여 전체적으로 재검토하고 2021. 12. 17.(금)까지 검토결과를 보내시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							나경운			열빛총괄과장					12/16 장병선
협조자
시행			설비부-18466									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화								/전송								/													/	대시민공개