시  민

문서번호	급수운영과-20343
보존기간	년
결재일자	2021. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최박	임인택	12/16 김종원
협 조

설계변경(1차) 심의결과 보고(마천동 외 14개동 상수도공사)

강동수도사업소

(급수운영과)

설계변경(1차) 심의결과 보고

2021년 마천동 외 14개동 상수도공사공사에 대한 설계변경 심의를 완료하고 그 결과를 보고함.

□ 설계변경 개요

가. 공 사 명: 마천동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사기간: 2021. 6. 21. ~ 2022. 6. 30.

다. 설계변경 금액 내역                                       단위: 원

구 분	당 초	변 경	비 고
도 급 액	***********	***********	-

□ 심의내용

가. 일시: 2021. 12. 15.(수)

나. 심의자: 급수운영과장 외 5명

다. 심의내용

○ 공종별 물량 증감에 따른 계약금액 조정 타당성 검토.

○ 신공종 발생에 따른 일위대가 산정의 타당성 검토.

□ 심의결과

- 설계변경 타당함.

□ 조치계획

- 상기사항을 반영하여 설계변경(최종)을 시행하고 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  1. 설계변경 심의의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.