투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재(데크목) 수량변경 및 납품기한 연장 요청(시립마포 실버케어센터 건립공사)

1. 우리 본부에서 추진 중인『시립마포 실버케어센터 건립공사』관급자재(데크목)의 수량변경 및 납품기한 연장을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 요청 내용

납품요구번호 (계약자)	품명	규격	수량(㎡)		납품기한		비고
			변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
**************** ********	조경시설물 (데크)	SYDECK- S224 1000*1000 *74mm	365	347	***********	**********.

- 수량 변경 사유: 실제 사용할 물량 정산

- 납품기한연장 요청사유: 관급자재 사용시기 미도래로 인한 납품기한 연기

붙 임: 관급자재 수량 변경 및 납품기한(변경) 연장 요청 1부. 끝.

	건축부장
주무관	손남기		의료시설과장	代손남기		건축부장	12/16 신명승
협조자
시행	건축부-20613	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2619	/전송	02-3708-2659	/	sng0103@seoul.go.kr	/	부분공개(5)