“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(1차) 시행(2021년 마천동 외 14개동 상수도공사)

우리사업소에서 시행중인 상수도공사의 설계변경(1차) 심의후 다음과 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 2021년 마천동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

2. 계약상대자: 용은씨엔씨(주)  대표 윤 석

3. 공사기간: 2021. 6. 21.~2022. 6. 30.

4. 변경사유: 급수공사 신청 및 배수관 정비에 따른 공종별 물량 증·감, 신공종 발생

5. 설계변경 내역

(단위: 원)

구 분		금 액		증 · 감	비 고
		당 초	변 경
도급비	공급가액	602,127,973	602,127,973	-
	부가가치세	60,212,797	60,212,797	-
	계	662,340,770	662,340,770	-

6. 차수별 부기금액 내역

(단위: 원)

구 분		금 액		증 · 감	비 고
		당 초	변 경
도급비	1차수(2021년)	400,000,000	222,240,000	감(177,760,000)
	2차수(2022년)	262,340,770	440,100,770	증(177,760,000)
	계	662,340,770	662,340,770	-

붙임  1. 설계변경 사전심의 결과서 1부.

2. 설계변경내역서 및 관련서류 각1부.  끝.

주무관	최박		급수운영팀장	임인택		급수운영과장	김종원		강동수도사업소장	12/16 김명용
협조자	주무관	권란연		주무관	이진이
시행	급수운영과-20371	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5150	/전송	02-3146-5189	/	chstar@seoul.go.kr	/	부분공개(5)