문서번호	급수운영과-21127
결재일자	2021. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	급수운영팀장	급수운영과장
조승수	서규석	12/16 이용구
협 조

설계변경 심의 결과보고 (제2회)-수정

(2021년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사))

2021. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 결과보고(제2회)-수정

(2021년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사))

「2021년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사)」 신규공종 및 물량 증·감 발생에 따른 설계변경(2회) 심의를 마치고 그 결과를 보고 드림.

※급수운영과-21079(2021.12.16.) 설계변경 심의 결과보고(제2회)의 수정보고서입니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사)

○ 계약기간 : 2021. 4. 30. ~ 2022. 6. 30.

○ 계 약 자 : 만보이엔씨(주) 대표자 김광운

○ 계약금액 : 금813,648,100원

○ 공사개요 : D=13~300㎜, L=1,463m

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일 시 : 2021. 12. 15.(수) 13:00

○ 장 소 : 남부수도사업소 3층 급수운영과 회의실

○ 심의내용 : 신규공종 및 계약물량 증·감사항 심의

○ 참석위원 : 위원장 급수운영과장 외 심의위원 3명(시설관리과)

간사 및 입회자 3명

□ 심의위원회 검토 내용

○ 설계변경 타당성 : 타당

○ 신규공종 및 계약변동물량 계약단가 적정 여부 : 적정

○ 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

○ 각종 제반규정 준수여부 : 준수

□ 설계변경 현황 (전체)

○ 계약금액 변경 - 변동없음

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	739,680,091	739,680,091	0
부가가치세	73,968,009	73,968,009	0
도 급 비	813,648,100	813,648,100	0

○ 공사개요 변경 - 변동없음

구 분	당 초	변 경
공사개요	D=13~300㎜, L=1,463m	D=13~300㎜, L= 1,463m

○ 주요 신규공종 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
싸인보드카	정차시	일	-	1	104,729

○ 주요 물량 증 ․ 감 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
콘크리트깨기	소형브레이커, 지세	㎥	22	48	3,150,004
터파기(기계100%)불량	굴삭기(타이어)0.18m3,지세	㎥	555	788	3,049,038
잔토처리(0.7상차비별도)	24DT,집하장→매립지(49.2km)	㎥	600	775	3,376,275
주철직관 부설	D=80mm~300mm	개소	531	592	365,595
주철(이형관) 부설	D=80mm~300mm	개소	212	242	1,105,804
원형밸브실 설치공 (기초재활용플라스틱)	D=80mm~300mm	개소	62	48	-5,840,462

□ 설계변경 현황 (1차수)

○ 계약금액 변경 - 변동있음

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	533,540,000	465,250,000	-68,290,000
부가가치세	53,354,000	46,525,000	-6,829,000
도 급 비	586,894,000	511,775,000	-75,119,000

[※ 차수별 설계변경] - 변동있음

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	813,648,100	813,648,100	0
1차수	586,894,000	511,775,000	-75,119,000
2차수	226,754,100	301,873,100	75,119,000

○ 공사개요 변경 - 변동있음

구 분	당 초	변 경
공사개요	D=13~300㎜, L=1,026m	D=13~300㎜, L= 1,296m

○ 주요 신규공종 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
싸인보드카	정차시	일	-	1	104,729

○ 주요 물량 증 ․ 감 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
콘크리트깨기	소형브레이커, 지세	㎥	21	48	3,246,926
인력 터파기	견질토사 0-2m, 지세	㎥	41	87	1,914,074
인력 터파기(협소, 지장물)	견질토사 0-2m, 지세	㎥	320	429	6,175,586
잔토처리(0.7상차비별도)	24DT,집하장→매립지(49.2km)	㎥	448	198	-4,829,038
주철(이형관) 부설	D=80mm~300mm	개소	190	216	844,829
원형밸브실 설치공 (기초재활용플라스틱)	D=80mm~300mm	개소	32	18	-5,923,002

□ 조치계획

○ 설계변경(2회) 심의위원회 개최결과, 적정한 것으로 심의되어 행정지원과에 계약의뢰하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.  끝.

3. 설계변경 사전심의 요청서 각1부.  끝.