문서번호	토목과-18044
결재일자	2021.12.16.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		도로관리팀장		토목과장		안전건설교통국장
박범준		代임수열		이호진		12/16 최연우
협조
	재무과장		송경택
	계약팀장		이은술

★ ◉

『연무장길 일대 보행친화형 도로공간 조성공사』

설계변경 검토 보고

2021. 12.

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [√] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

『연무장길 일대 보행친화형 도로공간 조성공사』

설계변경 검토 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명: 연무장길 일대 보행친화형 도로공간 조성

○ 기    간: 2020. 12. 18. ∼ 2021. 12. 20.

○ 도 급 자: 신유씨앤씨 주식회사 대표 장순일

○ 사 업 비: 금394,081,300원

□ 설계변경 내용

○ 설계변경 사유

- 현장 여건 등에 따른 신규공종 및 공종별 물량 증감 발생

- 공사 인접 구간 민원 등에 따른 노후 도로 및 도로부속시설물 정비 시행

- 건강·연금보험료 등 제경비 정산 시행

	※ 관련 근거
・토목과- 5058호(2021.04.12.): 현안사항 실정보고 ・토목과- 5706호(2021.04.26.): 현안사항 실정보고 ・토목과- 6099호(2021.05.03.): 현안사항 실정보고 ・토목과- 7345호(2021.05.27.): 현안사항 실정보고 ・토목과- 9263호(2021.07.02.): 현안사항 실정보고 ・토목과-11857호(2021.08.27.): 현안사항 실정보고 ・토목과-14225호(2021.10.18.): 현안사항 실정보고 ・토목과-15732호(2021.11.11.): 현안사항 실정보고 ・토목과-16625호(2021.11.26.): 현안사항 실정보고

○ 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ㆍ 감		비 고
총공사비	1,089,297,300	987,359,110	감	-101,938,190
도 급 비	394,081,300	462,880,000	증	68,798,700
관 급 비	423,410,000	479,314,150	증	55,904,150
이 전 비	271,806,000	45,164,960	감	-226,641,040

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사유로 공종별 변경된 사항에 대하여 첨부된 변경내역서와 같이 설계변경 및 정산 처리코자 함

붙임  1. 변경내역서 1부.
2. 일상감사 의견서 1부.

3. 실정보고 각 1부.
4. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.