문서번호	공원시설과-7144
결재일자	2021. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장
이호연	12/16 양돈욱

『2021 한강공원 주차장 유지보수공사 건설폐기물 처리용역』

설계변경(정산) 검토보고

2021. 12.

공  원  부

(공원시설과)

『2021 한강공원 주차장 유지보수공사 건설폐기물 처리용역』

설계변경(정산) 검토보고

우리 본부에서 시행중인 『2021 한강공원 주차장 유지보수공사 건설폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 조치 하고자 함

용역개요

○ 용 역 명 : 2021 한강공원 주차장 유지보수공사 건설폐기물 처리

○ 공사기간 : 2021. 1. 14. ~ 2021. 12. 31.

○ 계약금액 : 금14,345,000원

○ 계 약 자 : ㈜석장골재중기  대표  김옥진

변경내용

구 분	변 경 내 용	비 고
폐기물 운반 및 처리	▶ 처리량 변경에 따른 계약금액 조정
	- 폐콘크리트 운반 : 109.85㎥ → 68.56㎥	감)	41.29㎥
	- 폐콘크리트 운반 : 102.0㎥ → 34.76㎥	감)	67.24㎥
	- 혼합폐기물 운반 : 2.78㎥ → 0㎥	감)	2.78㎥
	- 폐콘크리트 처리 : 252.0톤 → 157.68톤	감)	94.32톤
	- 폐아스콘 처리 : 4.0톤 → 81.68톤	증)	77.68톤
	- 폐아스콘 처리(재생) : 235.0톤 → 0톤	감)	235.0톤
	- 혼합폐기물 처리 : 3.0톤 → 0톤	감)	3.0톤

설계변경 내역

구 분		금 액(원)		증․감
		당 초	변 경
도급액	공급가액	13,040,909	7,790,000	감)5,250,909
	부가세	1,304,091	779,000	감) 525,091
	계	14,345,000	8,569,000	감)5,776,000

○ 예산과목

- 한강사업본부 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 주차장 운영, 시설비

조치의견

○ 위와 같이 폐기물 운반 및 처리량 증·감으로 인한 계약금액 변동에 대하여 설계변경 시행하고자 함

붙임  변경내역서 1부.