투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(한강수상갤러리 조성 기반공사)

「한강수상갤러리 조성 기반공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰 합니다.

1. 공 사 명	: 한강수상갤러리 조성 기반공사

2. 계약기간	: 2020.12.27. ~ 2021.12.31.

3. 계약금액	: 금443,095,400원

4. 도 급 자	: 우원개발(주) 대표****

5. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증감
도 급 액	443,095,400	430,650,000	-12,445,400

바. 변경사유	: 현장 여건으로 인한 물량 변경 및 제경비 정산

사. 예산과목	: 한강공원 관리 및 운영, 한공공원시설 관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 시설비(401-01)

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	시설부장
주무관	임영준		기반시설과장	라철흠		시설부장	12/16 박상보
협조자	주무관	조승만		총무과장	정현석
시행	기반시설과-8117	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 서울시한강사업본부	/
전화	02)3780-0691	/전송	02)3780-0744	/	mulcon@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)