“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(2차) 및 차수별 금액변경 시행(2021년 마포구 관내 상수도공사)

우리 사업소에서 시행중인 『2021년 마포구 관내 상수도공사(연간단가계약)』와 관련 아래와 같이 설계변경(2차)을 시행하고자 합니다.

가. 공  사  명 : 2021년 마포구 관내 상수도공사(연간단가계약)

나. 계약대상자 :*****************

다. 계약  기간 : 2021.06.23.~ 2022.06.30.

라. 설계변경 금액 내역

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총 공사비		*************	*************	*****
도급액	1차수(2021년)	*************	***********	*************
	2차수(2022년)	***********	*************	*************
	총차	*************	*************	*
관급자재비		***********	***********	*
도로복구비 및 기타		***********	***********	*

(단위 : 원)

마. 설계변경 사유 : 공종별 계약물량 증․감 및 신규공종 발생

바. 1회 최대 이행금액 : 금500,000,000원

사. 예산과목 : 상수도사업비.영업비.급․배수공사비.신설공사비

상수도사업비.영업비.배급수비.수선유지교체비

상수도사업비,영업비,배급수비,지원사업성시설비

자본적지출.유형자산취득.구축물.시설비

자본적지출.유형자산취득.기계장치.시설비

소방용수시설설치개소수,소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설설치

소방용수시설설치개소수,소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설보수

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 심의 의결서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	정원형		급수관리팀장	노운학		급수운영과장	김원수		서부수도사업소장	12/17 김정일
협조자	주무관	김용섭
시행	급수운영과-20963	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 급수운영과 (홍제동)	/
전화	02-3146-3654	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)