코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	납품기한 연기의뢰(시립24시간게스트하우스 태양광발전장치)

1. 자활지원과-12819(2021.10.27.)호와 관련입니다.

2.「*********************************를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 계약내역

가. 건    명 : ***********************

나. 구매품목 :********************

다. 납품업체 :****************

라. 납품장소 : ************

마. 납품기한 :**************

바. 물품금액 : ********************

□ 납품기한 연기내역

가. 연기기한 : 2022. 1. 20.

나. 지체상금 부과여부 : 미부과

다. 연기사유 : 설치시설(납품장소)의 코로나19 확진자 발생에 따른 공사일정 지연

붙임  1. 납품기한 연기의뢰서 1부.
2. 증빙자료 1부.  끝.

							자활지원과장
주무관							박선정			자활시설팀장					代박선정					자활지원과장					12/17 강재신
협조자
시행			자활지원과-14818									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 서울특별시청 4층 (태평로1가)															/
전화		02-2133-7498						/전송			02-768-8867					/	stilllife@seoul.go.kr												/	부분공개(7)