문서번호	교량안전과-19216
결재일자	2021. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
박경민		김귀용	12/17 조현석
협조

2021년 동호대교 보수공사 설계변경(1회,정산)검토보고

-

2021. 12.

교량안전과

2021년 동호대교 보수공사

설계변경(1회, 정산) 검토 보고

‘2021년 동호대교 보수공사’의 물량 증감 및 신규물량 발생에 따른 설계 변경(1회, 정산) 검토 보고임

1		관 련 근 거

○ 동호대교 보수공사 실정보고(교량안전과-8950, ‘21.06.08)

○ 동호대교 보수공사 제 2회 실정보고(교량안전과-11167, ‘21.07.25)

○ 받침장치 교체방안 검토보고(교량안전과-16619, ‘21.11.03)

○ 설계변경(준공정산) 도서제출(한강교량 책임감리 2021-7401, ‘21.12.16)

1		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2021년 동호대교 보수공사

○ 공사내용 : 교면재포장 43.2a, 교량받침 교체 8개소, 후타재 보수 42.7㎡, 신축이음 누수 차단장치 40.8m

○ 공사기간 : 2021.4.23.∼2021.12.28.

○ 총공사비 : ******************************************

*************

○ 시 공 사 : ㈜윤산씨앤씨  대표 조영석

2		설계변경내용

가. 검토사유

○ 공사계약 일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)에 따라 추가 공사비 증감(신규공종, 수량증감)에 대하여 설계에 반영

나. 설계변경(제1회, 정산) : ********

****************************************

***********************************

*****************************

○ 주요 물량 변경

공종	세부공종	단위	당초	변경	증·△감	비고
교면보수공	소규모 보도부포장	㎡	*****	*	******
	아스팔트 덧씌우기(T=6cm)	a	*	***	*****
포장부대공	보도부 유공관 설치	개소	*	**	******
	주입줄눈공(60mm)	m	*	*****	*****
교면방수공	면처리작업	a	****	*	*********
	강상판 표면처리	a	****	*	*********
	강상판볼트 녹제거	㎡	*****	*****	*********
도막식방수	교면방수	㎡	*****	*****	*****
포장방수	구스아스팔트 포장(T=4cm)	㎡	*****	*	*********
	구스아스팔트 포장(T=6cm)	㎡	*	*****	*********
	거푸집 설치 및 해체	㎡	*	*****	*****
상판보수	콘크리트바닥판열화단면제거	㎡	*	*****	*****
	상판보수(T=30mm)	㎡	*	****	*******
	상판보수(T=50mm)	㎡	*	**	**
	상판보수(T=70mm)	㎡	*	*****	*****
받침교체공	고재 처리	kg	*	********	********
신축이음보수공	후타재보수(T=30mm)	㎡	*	***	***
	후타재보수(T=60mm)	㎡	*	*	*
	후타재보수(T=100mm)	㎡	*	****	****
	후타재보수(T=130mm)	㎡	*	***	***

○ 공사비 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·△감	비고
총공사비	*************	*************	**************
도 급 비	*************	*************	**************
관급자재비	**********	**********	*************
이 전 비	**********	**********	*************	폐기물처리

○ 단가 검토

- 기존비목은 계약단가 적용

- 신규비목은 설계변경 당시를 기준으로 한 단가에 낙찰률(87.176%) 적용

(붙임  건설사업관리단 검토의견서 참조)

3		검토의견 및 조치계획

○ 책임건설사업관리기술인의 설계변경도서 제출내용에 대한 검토결과   설계변경(1회, 정산) 내용이 적정한 것으로 판단되므로 변경계약  완료 후 준공처리 하고자 함

붙임  1. 책임건설사업관리기술인 검토의견서 1부

2. 변경내역서 1부.

3. 설계변경 자문회의 결과 1부.

4. 검증확인서 1부.  끝.