문서번호	공원시설과-7182
결재일자	2021. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
이호연		양돈욱	12/17 김상국
협조

『2021 한강공원 주차장 유지보수공사(연간단가)』

설계변경(정산) 검토 보고

2021. 12.

공  원  부

(공원시설과)

『2021 한강공원 주차장 유지보수공사(연간단가)』

설계변경(정산) 검토 보고

『2021 한강공원 주차장 유지보수공사(연간단가)』작업지시 정산 물량 증·감, 제경비 정산 등 설계변경(정산)을 시행하고자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 2021 한강공원 주차장 유지보수공사(연간단가)

○ 위    치 : 한강공원 43개 주차장

○ 공사내용 : 차선도색, 주차블록, 시선유도봉 등 주차시설물

○ 계약기간 : 2021. 2. 9. ~ 12. 31.

○ 계약금액 : *****************

○ 계 약 자 : ***************

설계변경 사유

○ 작업지시 완료 물량 정산에 따른 증․감 발생

○ 제경비(보험료, 안전관리비, 환경보전비) 등 비용 정산

설계변경 내용

구 분		당 초	변 경	비고(증·감)
총 공 사 비		***********	***********	**	**********
도급비	공급가액	***********	***********	**	**********
	부가가치세	**********	**********	**	*********
	소 계	***********	***********	**	**********
관 급 비		**********	**********	**	**********
이 전 비		**********	*********	**	*********

○ 주요변경 내용

공 종	주 요 내 용	단위	수 량				공사비 (증·감)
			당 초	변 경	증·감
토공	파쇄물 상차 및 운반	㎥	***	**	**	***	**	***
	토사운반	㎥	**	**	**	**	**	*****
포장공	보도용 블록 포장	a	****	***	**	****	**	******
	아스팔트콘크리트 포장	a	****	****	**	***	**	*****
	콘크리트포장	㎡	*	****	**	****	**	******
시설물공	시선유도봉 설치	개소	*****	***	**	*****	**	******
	시선유도봉 철거	개소	***	***	**	***	**	***
	표지판 설치 및 철거	개소	***	**	**	***	**	******
	주차블록 설치 및 철거	개소	*****	*****	**	***	**	******
	과속방지턱 설치	m	***	***	**	**	**	******
도색공	차선 제거 및 도색	m	*****	******	**	*****	**	******
부대공	가림막안전펜스	개	*	***	**	***	**	*****
	공사홍보물(배너,간판 등)	개	*	***	**	***	**	*****
	교통정리원	일	*	**	**	**	**	*****
	기타	식	*	*	**	*	**	*****
제경비 정산
	건강보험료						**	*****
	노인장기요양보험료						**	***
	연금보험료						**	*****
	퇴직공제부금						**	*****
	산업안전보건관리비						**	*****

○ 예산과목

- 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 주차장 운영,        시설비 및 부대비, 시설비

조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 시공 물량 증·감 및 제경비(보험료, 산업안전보건관리비 등)의 정산을 반영한 설계변경(정산) 시행하고자 함.

붙임  1) 변경내역서 1부.

2) 제경비 요율 검증 1부.